문서번호	정보시스템담당관-13169
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	11/15 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(10월4주차~11월2주차)

2017. 11.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간(월간)업무 현황보고(10월4주차~11월2주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 10. 20. ~ 2017. 11. 9.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	85%	63%
사업관리(착수)	91%	30%
분석	100%	41%
설계	100%	85%
구현	100%	52%
테스트	91%	41%
운영이관	4%	0%

❍ 추진실적

- 개발 : 52% 완료

․일반사용자, 자치구/외부사용자, 관리자 페이지 개발

- 테스트 : 41% 완료

․기능별 단위테스트

․IE8, IE9, IE10, IE11, chrome, fire fox 호환성 테스트

․웹표준 웹접근성 적용 테스트

❍ 담당자 의견 : 계획대비 –22% 일정이 지연된 상태

- 10월 월간보고 및 11월 2주 주간보고를 문서로만 제출하는 등 투입인력 통제 어려움

- 사업자는 재정적인 문제로 이후 사업포기에 대해 검토 진행

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 3부.

2. 월간업무 현황 보고서 1부.

4. 작업분할표(WBS) 1부.  끝.