＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2017년 토목,건축 시설물 유지보수공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『2017년 토목,건축 시설물 유지보수공사』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : 지티엘이엔씨(주) 대표 김창용

다. 공사규모 : 콘크리트균열보수75㎥, 표면보수228㎡, 우레탄방수페인트228m,

단면복구(T=10～30mm) : 275㎡.

라. 공사기간 : 2017.03.14 ~ 2017.11.30

마. 설계변경 금액 내역                                        (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	88,416,530	88,400,000	감16,530

바. 설계변경사유 : 시공물량 증․감 발생 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

※ 추산 : 11/15

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  4. 합의서 1부.  끝

주무관	김우승		주무관	윤충용		정수시설과장	이흥수		광암아리수정수센터소장	11/15 차윤기
협조자
시행	정수시설과-9136	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)