투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(금천구 박미사랑공원 지장물 철거공사)

1. 시설과-3822(2017. 11. 14.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건    명 : 금천구 박미사랑공원 지장물 철거공사

나. 계 약 자 : 강남건영(주) 대표 신승호

다. 계약금액 : 금116,209,900원(금일억일천육백이십만구천구백원)

라. 계약기간 : 2017. 8. 17.~ 2017. 11. 15.

마. 변경내용 : 준공기한 변경

○ 당초 : 2017. 11. 15. → 변경 : 2017. 12. 30.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		주무관	代김선희		공원운영과장	문근식		서부공원녹지사업소장	11/15 김종근
협조자
시행	공원운영과-18601	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)