아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰 (내부순환로(사근연결로 주변) 교통체계 개선 타당성조사 용역)

1. 도로계획과-16146호(2017.11.15.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 “내부순환로(사근연결로 주변) 교통체계 개선 타당성조사 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 내부순환로(사근연결로 주변) 교통체계 개선 타당성 조사

나. 계  약  자 : 에이스톤엔지니어링㈜

다. 준공예정일 : (당초) 2017.11.22. → (변경) 2017.12.29.

라. 귀책  소재 : 서울특별시(지체상금 부과여부 : 미부과)

마. 연기  사유 : 연기 의뢰서(붙임1) 참조

붙임  1. 용역 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 용역 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 합의 각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	이민경		도로시설계획팀장	양돈욱		도로계획과장	11/15 하종현
협조자	계약1팀장	代오선숙
시행	도로계획과-16154	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개