문서번호	시설보수과-9944
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장
최지락	김종성	11/16 신동헌
협 조

홍제교 보도부 정비계획 보고

2017. 11.

서부도로사업소

(시설보수과)

홍제교 보도부 정비계획 보고

홍제교의 노후된 보도포장 정비와 차량방호책 설치를 통해 시민 불편해소 및 안전사고를 미연에 방지하고자 현황조사를 실시하고 정비계획을 보고드림

□ 추진근거

◦ 민원(다산콜********2001279, 다산콜********5001748)

- 홍제교 인도 바닥이 훼손되어 보행에 지장을 주므로 정비 요청

- 버스정류소 앞 도로가 움푹파여 빗물이 고이고 휠체어,유모차 통행시 매우 불편

◦ 2017년 홍제교 정밀점검용역 결과

- 공용기간 경과에 따른 노후화로 전반적으로 열화가 진행되고 있으며, 바닥판 하면 백태 등 보도부측 교면방수 열화가 진행중일 가능성이 높음. 장기적인 관점에서 보도부에 대한 전반적인 정비(재포장)을 고려하는 것이 바람직.

□ 시설물 현황

◦ 위    치 : 서대문구 홍제동 266-271

◦ 준공년도 : 1980년 2월

◦ 제    원 : L=71m, B=24m(왕복4차로)

◦ 위치도 및 보도부 전경사진

□ 현장조사

◦ 보도부 포장 현황

- 콘크리트 포장 상태로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 열화가 보도부 전체에 걸쳐 발생하였으며 골재 등의 탈락으로 요철이 심한 곳은 상온아스콘 응급복구를 실시한 구간이 있음

- 현황사진

상행 보도(버스정류소)	하행 보도

◦ 차량방호책 설치 현황

- 하행 보도는 유진상가와 인접해 있어 차량방호책이 없으며 상행 보도측은 교량상 설치된 마을버스 정류장으로 인해 일부 구간만 설치되어 있음.

- 상태는 대체적으로 양호하나 검증이 안된 제품으로 차로를 이탈한 차량에 대한 방호 기능은 떨어질 것으로 판단됨

- 현황사진

상행 보도측 차량방호책	지장물 현황(버스정류장)

□ 조치의견

◦ 하행 보도는 적재물 및 차량주정차로 인해 시민들의 통행이 비교적 많지 않아 금회 민원 제기된 상행측 보도구간에 대하여 아스콘 포장을 실시하고,

◦ 안전사고 예방을 위해 상행 보도측 기설치된 방호책을 철거 후 보차도 경계부에 연석 및 기준에 맞는 차량방호책의 설치가 필요할 것으로 판단됨

◦ 상기사항에 대하여 시민불편 해소 및 안전사고 예방을 위해 ‘2017년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사’ 활용하여 정비하고자 함.

※ 개략공사비(도급비) : 55백만원

- 보도부 방수 및 아스콘포장 2.4a       - 연석설치 46m

- 차량방호책 설치 46m.  끝.