문서번호	수상안전과-5493
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		송재우	11/16 최규해
협조

- 한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험 -

준공 기한 연기 검토 보고

2017. 11. 16

한강사업본부

(수상안전과)

한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험

준공기한 연기 검토 보고

한강르네상스호의 중간검사와 관련하여 검사관의 지적사항에 따라 아래와 같이 준공기한을 연기하여 검사에 만전을 기하고자 함

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험 용역

○ 용역내용 : 한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험 및 시운전

*******************************

*************************

○ 계 약 일 : 2017.10.27

○ 준공기한 : 2017.10.30. ~ 2017.11.23

검사개요

○ 검사대상 : 한강르네상스호

▸ 194톤, LBD 37mx9mx2.5m, 2009.07.01건조

○ 검사기간 : 2017.9.18.(전후3개월)

▸ 2017.11.15. : 1차 검사,  2017.12.19. : 2차 검사 예정

○ 관련법령 : 선박안전법 제2장 제9조(중간검사)

검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 선박안전기술공단(KST)의 선체, 기관 검사관의 1차 검사시 지적사항이 발생

하여 조치후 주기관 및 발전기 안전시험 및 시운전을 2차 검사시 진행하고자

용역기간 연장을 요청함

○ 지적사항

- 우현 주기 연료유 차단 밸브 정비 요함

- 무선국 검사 결과 보고서 제출

- 워터제트실 인화성 물질 제거

- 주기관 및 보조기관 효력시험 준비 요함

- 화재탐지장치, 소화펌프 및 제반설비 효력시험 준비 요함

- 기타 비품 비치 요함

○ 준공기한 연기

- 당 초 : 2017.11.23

- 변 경 : 2017.12.19

□ 검토의견

○ 선박안전기술공단(KST) 검사관의 지적사항에 따라 조치 후 상기와 같이

준공 기한을 연기하여 검사에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 계약서, 준공기한 연기의뢰서 각 1부.

2. 수리보완요청서(KST) 1부.  끝.