문서번호	생태공원과-3153
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
김화시	代임이환	11/16 문길동
협 조
	주무관		주홍열

2017년 난지한강숲 조성사업 설계변경 시행

2017. 11.

한강사업본부

생태공원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

난지한강숲 조성사업 설계변경 시행

한강 자연성 회복사업의 일환으로 한강변 울창한 숲 조성을 위해 시행중인「난지 한강숲 조성사업」에 대하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 난지 한강숲 조성사업

○ 공사기간 : 2017. 08. 21. ~ 11. 18.

○ 주요내용 : 수목식재, 객토, 산책로 정비 등

○ 도 급 비 : 금1,029,700,000원

○ 도 급 자 : 용일토건(주) 대표 박준상

▢ 주요변경사항

○ 추가식재 요청 민원 요구사항 반영 및 경관개선을 위한 식재수목 증감

○ 현장여건에 맞추어 객토 물량 조정 반영

○ 식재수량 변경에 따른 식재 부대공사(지주목, 퇴비 등) 실물량 반영

○ 남부수종 활착을 위한 월동 자재(바람가림막, 바크 등) 추가

▢ 설계변경 내용

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
식재 및 부대공사	▶ 현장여건에 맞게 이식수목 규격 및 수량 조정 - 느티나무(H4.0×R12) : 3주 → 0 - 느티나무(H3.5×R10) : 2주 → 0 - 메타세콰이어(H5.5×B10) : 6주 → 0 - 서어나무(H4.0×R12) : 1주 → 0 - 왕벗나무(H4.0×B10) : 1주 → 0 - 느릅나무(H4.5×R20) : 0 → 1주 - 느티나무(H4.5×R19) : 0 → 1주 - 느티나무(H4.5×R20) : 0 → 1주 - 느티나무(H4.5×R22) : 0 → 1주 - 느티나무(H4.5×R28) : 0 → 1주 - 메타세콰이어(H8.0×B25) : 0 → 2주 - 메타세콰이어(H8.0×B27) : 0 → 1주 - 메타세콰이어(H8.0×B28) : 0 → 1주 ▶ 하부식재 기반조성을 위한 고사목 및 수형 불량목 제거 - 아카시아(R5) : 0 → 30주 - 아카시아(R9) : 0 → 3주 - 아카시아(R12) : 0 → 1주 - 아카시아(R14) : 0 → 2주 - 아카시아(R15) : 0 → 2주 - 아카시아(R16) : 0 → 1주 - 아카시아(R17) : 0 → 1주 - 아카시아(R21) : 0 → 1주 - 버드나무(R5) : 0 → 5주 - 버드나무(R13) : 0 → 3주 - 버드나무(R20) : 0 → 5주 - 버드나무(R22) : 0 → 2주 - 버드나무(R33) : 0 → 1주 - 버드나무(R36) : 0 → 1주 - 느릅나무(R5) : 0 → 10주 - 느릅나무(R14) : 0 → 5주 ▶ 일부 구간의 누락된 잔디 및 느티나무 추가 식재 - 잔디(평떼) : 2,900㎡ → 3,334㎡ - 느티나무(H4.0×R15) : 5주 → 9주 ▶ 민원사항 반영 및 한강경관 개선을 위해 추가 식재 및 일부 수목 규격조정 반영 - 대왕참나무(H7.0×R40) : 5주 → 15주 - 대나무(H3.5xR3): 0 → 300주 - 남천(H0.8×2가지) : 530주 → 2,800주 - 황금사철(H0.7×W0.2) : 0 → 2,800주 - 사철(H1.0×W0.3) : 2,960주 → 0 - 좀목형(H2.0×W1.0) : 0 → 50주 - 살구(H3.0×R8) : 0 → 30주 - 복자기(H2.5×R8) : 0 → 40주 - 산수유(H2.5×R8) : 0 → 40주 - 산철쭉(H0.4×W0.4) : 4,900주 → 4,250주 - 갯버들(H1.0) : 37,100주 → 29,800주 - 화백나무 규격 및 수량 조정 · H2.5×W1.0 : 294주 → 0 · H3.5×W1.5 : 0 → 120주 - 호랑가시나무 규격 조정 · H2.0×W1.0 : 33주 → 0 · H1.5×W0.6 : 0 → 33주 ▶ 수목 현항에 맞게 지주목 규격 조정 및 추가식재 수량 반영 - 대형삼발이(Φ60×L2700): 7조 → 23조 - 중형삼발이(Φ50×L1800): 208조 → 251조 - 소형삼발이(Φ40×L1500): 489조 → 466조 - 이각지주목(Φ40×L1200): 166조 → 136조 - 연계형지주목(Φ40×L1200): 61개소 → 121개소 - 와이어형지주목(모아심기): 0 → 1개소 - 와이어형지주목(8mmx8m): 0 → 12조 - 와이어형지주목(6mmx6m): 0 → 8조 ▶ 토양 과습 우려구간 보습제 수량 제외 - 보습제 : 733㎏ → 0 ▶ 객토 수량산출 오류로 인한 부족 객토물량 보완 - 마사 : 908㎥ → 1,815㎥ - 현장유용토 활용 : 0 → 508㎥ - 객토 터파기 : 1,471㎥ → 2,416㎥ - 객토부설(되메우기) : 1,416㎥ → 2,349㎥ - 사토처리 : 1,616㎥ → 1,909㎥ ▶ 장미식재지 경관개선을 위한 바크 포설 - 바크포설(T50) : 0 → 868㎡ ▶ 추가 식재 및 현장여건에 맞게 유공관 및 수목표찰 수량 조정 - 유공관 : 2,333개소 → 2,330개소 - 수목표찰 : 188ea → 204ea
우배수 공사	▶ 현장여건을 고려하여 맹암거 및 우수관 물량 조정 - 간선(D300) : 381m → 286m - 지선(D150) : 430m → 335m - 우수관 : 107m → 10m - 배수용 맨홀 : 7개소 → 3개소 - 관천공 및 접합 : 4개소 → 3개소 - 경화토포장(철거) : 154.1㎡ → 82.4㎡ - 경화토포장(재포장) : 154.1㎡ → 82.4㎡ ▶ 흄관설치 일부구간을 PVC이중벽관으로 변경 - PVC이중벽관 : 0 → 28m
시설물 공사	▶ 강변인접 화백 활착을 위한 방풍막 설치 - 방풍막(H3000×W3000) 설치 : 0 → 47경간
임시 공사	▶ 기상여건에 따라 가배수로, 침사지설치, 오탁방지망 수량 제외 - 가배수로A : 233m → 0 - 가배수로A 철거 : 233m → 0 - 가배수로B : 80m → 0 - 가배수로B 철거 : 80m → 0 - 침사지A : 1개소 → 0 - 침사지A 철거 : 1개소 → 0 - 침사지B : 1개소 → 0 - 침사지B 철거 : 1개소 → 0 - 오탁방지망 : 2span → 0 - 오탁방지망(철거) : 2span → 0
기 타	▶ 가설사무소(3×6)설치 반영 - 가설사무소(3×6) : 0 → 1개소 ▶ 공사구간 안전사고 예방을 위한 가림막휀스 설치 - 가림막휀스(H1800×W2300) : 0 → 115경간 ▶ 우배수, 포장, 가시설물 설치 등의 수량 변경에 따른 토공 및 폐기물량 조정 - 터파기 : 1,041.88㎥ → 499.43㎥ - 되메우기 : 638.63㎥ → 160.16㎥ - 사토처리 : 403.26㎥ → 339.27㎥ - 폐기물(임목+폐콘) : 23.49㎥ → 32.25㎥ ▶ 추가 식재에 따른 관급자재 수량 조정 - 퇴비 : 4,679포 → 6,416포

▢ 설계변경 금액

○ 총공사비 ┏ 당 초 : **************

┗ 변 경 : ******************************

(단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공사비		*************	*************	************
도급비	공급가액	***********	*************	************
	부 가 세	**********	***********	***********
	도 급 비	*************	*************	************
관급자재비		***********	***********	***********

▢ 예산활용 계획

○ 난지한강숲사업 예산 낙찰차액 중 145,226천원 활용

(단위 : 원)

세부사업별	예 산 액 (A)	발주금액 (B)	계약금액 (C)	예산잔액 (A-B)	낙찰차액 (B-C)
계	2,500,000,000	2,439,031,210	2,170,907,230	60,968,790	268,123,980
난지한강숲	1,500,000,000	1,446,269,470	1,297,110,440	53,730,530	149,159,030
여의도 이용숲	500,000,000	493,291,050	433,790,350	6,708,950	59,500,700
미루나무숲	500,000,000	499,470,690	440,006,440	529,310	59,464,250

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강숲조성, 시설비(100-401-01)

▢ 조치계획

○ 위와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경 도서 1부.