＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기(보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

나. 계약업체 : 우제이건설(주)  대표 김주연

다. 계약금액 : 금897,012,760원

라. 준공기한 연기

- 당 초 : 2017.08.28.~2017.12.31.

- 변 경 : 2017.08.28.~2018.05.26.

마. 귀책소재 : 중부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 : 절대공기 부족으로 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 관련공문 각 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

주무관							최성태			주무관					代최성태					급수운영과장					유용일				중부수도사업소장						11/16 유경애
협조자				주무관						김유리나
시행			급수운영과-26219									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-2158						/전송			3146-2189					/													/	부분공개(5)