＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 결과 보고[2017년 토목,건축 시설물 유지 보수공사(연간단가)]

우리 센터에서 시행중인 공사에 대하여 변경계약을 체결하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 토목,건축 시설물 유지 보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : (주)지티엘이엔씨, 대표 김 창 용

다. 계약변경 내역

1) 준공기한 : 2017. 03. 10 ~ 2017. 11. 30(변경 없음)

2) 계약금액

○ 1차변경 : 당초 68,416,530원 → 변경 88,416,530원(증20,000천원)--‘17.09.14

○ 2차변경 : 당초 88,416,530원 → 변경 88,400,000원(감16,530원)

3) 변경사유

○ 시공물량 증·감 발생 정산

라. 변경계약 일자 : 2017. 11. 16

붙임 : 1. 변경 계약서 1부,  2. 변경 내역서 1부,  3. 합의서 1부.

4. 공사계약 일반조건 1부, 5. 서울시 공사계약 특수조건 1부.  끝.

주무관							윤충용				행정관리팀장					권영철					광암아리수정수센터소장					11/16 차윤기
협조자
시행			행정관리팀-2798										(						)		접수												(						)
우	12989					경기도 하남시 서하남로 293																/
전화		02)3146-5312							/전송			02)3146-5309					/														/	부분공개(6)