문서번호	도시철도토목부-14859
결재일자	2017.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	11/16 김진팔
협조
	주무관		서재원

「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사」

구조물 방수층보호재 설계도서 검토보고

2017. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

구조물 방수층보호재 설계도서 검토보고

본선 및 #3번 환기구 등 구조물에 시행 예정인 방수층보호재에 대한 설계도서 반영사항에 대해 검토한 보고임.

【관련공문 대한(하남) 제17-559호(2017.11.13.) 】

1		공사개요

❍	공 사 명	:	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
❍	위치	:	강일동 동광교회 ~ 서울시계
❍	규모	:	1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m, 환기구 1개소)
❍	공사기간	:	2015.03.30 ~ 2018.07.26
❍	시 공 사	:	쌍용건설㈜
❍	사업관리단	:	㈜대한콘설탄트 외 2개사
❍	사업비	:	40,567백만원

2		현 안 사 항

❍ 본선 및 환기구 등 구조물 방수층의 보호를 위해 시공하는 보호재 중 상부슬라브 방수층보호재에 대한 적용이 계약문서 간 서로 상이

구 분	방수보호재 적용내용			비 고
	하부슬라브	벽 체	상부슬라브
시 방 서	보호몰탈 (t=30㎜)	PE보호재	보호몰탈 (t=50㎜)
설계도면	보호몰탈 (t=30㎜)	미 지 정	미 지 정
물량내역서	보호몰탈 (t=30㎜)	PE보호재 (t=20㎜)	PE보호재 (t=20㎜)

❍ 설계서 간에 상이하게 적용되어 있는 상부슬라브 방수층보호재 규격에 대해서는 지하철구조물의 기능과 안전을 확보할 수 있도록 설계서 보완이 필요

❍ 관련규정

【공사계약 일반조건】 제6절 공사 설계의 변경

1. 설계변경

가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 한다.

1) 설계의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2. 설계서의 정정·보완

나. 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 해야 한다.

3) 설계도면과 공사설계설명서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사설계설명서에 물량내역서를 일치시킨다.

【공사계약 특수조건】 제4조(계약문서)

① 계약을 구성하는 문서는 상호 보완적이지만 일반조건 제6절의 2와 같은 오류 시의 우선순위는 아래와 같다.

1. 계약담당자의 설계변경 및 계약변경 승인문서,   2.계약서

3. 공사계약특수조건 Ⅱ,                   4. 공사계약특수조건 Ⅰ

5. 공사계약일반조건,                      6. 현장설명서

7. 공사설계설명서(시방서)                 7. 설계도면

9. 공종별 목적물 물량내역서,             10. 산출내역서

3		건설사업 관리단 검토의견

❍ 구조물 상부슬라브 방수층보호재를 PE재질로 사용시 중앙파일 제거 및 상부 되메우기 작업시 보호재와 방수층의 손상으로 구조물 품질저하가 우려됨.

❍ 상부슬라브 방수층보호재 타현장 적용사례

- 9호선 3단계(918~923공구) : 방수보호몰탈 (t50㎜)

- 하남선(5호선연장) 1-1,1-2공구 : PE방수보호재 (t20㎜)

- 하남선(5호선연장) 2~5공구 : 방수보호몰탈 (t50㎜)

❍ 설계서의 내용이 누락, 오류 있을 경우 또는 설계도서간(시방서, 설계도면, 물량내역서) 내용이 서로 상이할 경우에는 공사계약 일반조건(제6절 1항, 2항) 및 특수조건(제4조)에 의거 설계변경 조치함이 타당.

❍ 적용단가검토

- 관련규정 : 지방자치단체 공사계약일반조건 제7절 계약금액의 조정

- 단가적용 : 설계가 대비 × 낙찰률 (78.229%)

- 보호재 규격에 따른 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분		수량 (㎡)	금 액		비 고 (몰탈 - PE)
			PE방수보호재	보호몰탈(t50㎜)
	본선구간	4,218	21,664	40,771	19,107
	#3번 환기구	403	2,066	3,895	1,829
	입출고선(분기부)	1,431	7,337	13,832	6,495
직접공사비			31,067	58,498	27,431
제 경 비			7,032	19,413	12,381
계			38,099	77,911	증)39,812

4		처리의견

❍ 본선 및 #3번 환기구 등 구조물 상부에 시공예정인 방수층 보호재 규격에 대한 건설사업관리단의 검토가 적정한 것으로 판단되므로,

❍ 건설사업관리단의 검토의견에 대해 승인하고 추후 설계변경 심의 및 설계변경하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견 1부.  끝