투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	예산 사고이월 요청(사천교 성능개선)

1. 우리 사업소에서 시행중인 「사천교 성능개선공사」 관련입니다.

2. 위 공사 진행중 성능개선 구간 철거 후 기존 존치교량 노출면 바닥판 손상에 대하여 감리단 및 외부전문가 현장조사 검토 및 자문 결과 추가적인 바닥판 전면 보강이 필요하다는 의견에 따라 해당 추가작업에 필요한 절대공기 확보를 위하여 2018.5.30.까지 준공기한을 연장하였는 바, 그에 따른 2017년 예산 사고이월 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 2017년 예산 사고이월 요구 현황

구 분	예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	2,717,000,000 ( )	2,717,000,000	2,716,586,710	2,086,080,490	630,476,220 ( )	443,290
시 설 비	2,317,000,000 ( )	2,317,000,000	2,316,586,710	1,713,656,490	602,900,220 ( )	443,290
감 리 비	400,000,000 ( )	400,000,000	400,000,000	372,424,000	27,576,000 ( )	0

붙임 : 1. 사고이월 명세서 및 요구서 각1부.

2. 사천교 바닥판 손상에 따른 조치방안 검토보고서 1부.

3. 감리단 검토보고서 및 외부전문가 자문의견서 각1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	11/17 신동헌
협조자
시행	시설보수과-10004	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	부분공개(5)