투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(사천교 확장 및 성능개선공사)

1. 시설보수과-9984(2017.11.17)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 있는 「사천교확장 및 성능개선공사(장기계속)」와 관련하여 다은과 같이 준공기한을 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사천교확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 준공기한 연기내역

- 당 초 : (총차) 2016. 04. 12 ~ 2017. 11. 21

(2차)  2017. 04. 27 ~ 2017. 11. 21

- 변 경 : (총차) 2016. 04. 12 ~ 2018. 5. 30

(2차)  2017. 04. 27 ~ 2018. 5. 30

다. 책임소재 : 발주처 귀책사유

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 준공기한 연기사유

- 사천교 기존교량 바닥판 손상에 따른 전면 재보강 등 추가공사 필요에 따른 절대공기 반영을 위한 준공기한 연장

※ 추가공사비 등 일부 예산 사고이월 조치 예정

붙  임 :  사천교 바닥판 손상에 따른 조치방안 검토보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	김종성		시설보수과장	11/17 신동헌
협조자
시행	시설보수과-9985	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	부분공개(5)