문서번호	설비부-19410
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	11/17 권오식
협조

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

『만리재로 보행환경개선 전기공사(2차)』준공기한 연기를 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 만리재로 보행환경개선 전기공사

□ 위    치 : 서울역 고가 접속부 ~ 마포구 공덕오거리

□ 규    모

○ 가 로 등 : 가로등 개량(LED 100W, 9m) 159본, 가로등 분전반 7면 등

○ 교통신호 : 교통신호기 5개소 등

□ 계약금액 : 861백만원(2차 : 767백만원)

□ 공사기간 : `16.12.15. ~ `17.11.26.

○ 2차 : `17.06.01. ~ `17.11.26.

Ⅱ		보고내용

□ 관련근거

○ `17.11.13. : 경찰청 교통규제 심의 추가 및 변경에 따른 기간 필요(대영GE17A-11-08)

○ `17.11.14. : 마포구청 가로등 추가 교체 요구(8본)(토목과-19847)

□ 준공기한 연기 내용

○ 공사기간 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
2 차	`17.06.01. ~ `17.11.26.	`17.06.01. ~ `17.12.08.	- 12일 연장 -계약금액 변경 없음
총 차	`16.12.15. ~ `17.11.26.	`16.12.15. ~ `17.12.08.

○ 준공기한 연장 사유

- 마포구청 추가요구사항과 경찰청 교통규제 심의 추가 및 변경에 따라 절대공기 부족으로 공기 연장 필요

○ 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 : 미부과

□ 보고자 조치 의견

○ 유지관리부서 요구사항 시행 등을 위해 작업 및 자재준비 시간 부족함으로 준공기한 연기조치하고자 함

Ⅳ		향후계획

○ `17.11. : 변경계약

○ `17.12. : 공사준공 및 인수인계

붙임 : 관련공문 사본 2부 및 합의서 1부.  끝.