문서번호	도로보수과-12206
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		강종훈	11/17 한동근
협 조
	주무관			이상하

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

예산집행잔액 사용 및 설계변경 검토 보고(제2회)

2017.  11. 16.(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

예산집행 잔액 사용 및 설계변경 검토 보고(제2회)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 시행 중 민원사항 증가 등에 따른 필요예산 부족분에 대하여 낙찰차액 등 예산집행 잔액을 사용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2017. 04. 03. ~ 2017. 12. 31

○ 계약금액 : 514,974,900원

○ 계 약 자 : ㈜렉스  대표 전현신

○ 공사규모

- 노면표시 도색 및 제거   L= 262,819m

- 도로표지병 설치 및 철거 N=       72개

□ 예산집행 잔액 사용계획

○ 관련근거

- 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23)

- 2015년 교통안전시설 예산 집행 철저(교통운영과-17116, 2015.9.3.)

불용예산이 최소화 될 수 있도록 예산집행 철저.

○ 노면표시 예산집행 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	예산 배정액	원인행위액		사용예정액		비 고 (공정)
		도 급	관 급	낙찰차액	집행잔액
노면표시 도색 및 제거	839,000	459,712	278,063	69,438	31,787	95%

- 상기 공사시행 중 기 작업물량이 공사계약 금액에 근접할 뿐만 아니라, 추가로 발생하는 경찰청 교통규제심의 및 민원 증가 등에 따른 필요예산 부족으로 교통안전시설 유지관리에 어려움이 있음.

- 해당 사업의 낙찰차액 및 집행잔액을 교통사고 예방을 위한 노면표시 유지관리 및 민원처리에 소요되는 공사비로 사용코자 함.

□ 설계변경 시행(제2회)

○ 관련근거 및 사유

- 2017년 중앙버스전용차로흐름개선사업 시행계획 보고(도로보수과-6321)

⤷ 마포대로 교통체계개선 사업비 재배정 시행(교통운영과-9551)

- 2017년 도로교통소통 개선사업 시행계획 보고(도로보수과-6335)

⤷ 2017년 도로교통소통개선 사업 공사 시행 요청 및 예산 재배정(교통운영과-9766)

- 2017년 자전거도로 유지보수사업 시행계획 보고(도로보수과-6644)

⤷ 2017년 자전거도로 유지보수 1단계사업 시행을 위한 예산 재배정 및 공사시행 협조 요청(자전거정책과-6416)

- 2017년 안전속도 5030 시범사업 시행계획 보고(도로보수과-8798)

⤷ [안전속도 5030 2차 시범사업] 추진에 따른 예산 재배정 알림(교통운영과-15453)

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	763,034,270	1,097,984,460	증)334,950,190
도 급 비	514,974,900	785,467,330	증)270,492,430
관급자재비	248,059,370	312,517,130	증) 64,457,760

○ 주요공정 및 수량 변경내역

공 정 명	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
노면표시 도색	m	23,617	79,935	증) 56,318
노면표시 재도색	m	226,332	228,162	증) 1,830
노면표시 제거	m	11,553	32,672	증) 21,119
수용성 도색	m	1,187	1,187	-
차로밑그림 도색	m	60	60	-
열부착테이프 설치	개	0	137	증) 137
도로표지병 설치	개	40	40	-
도로표지병 철거	개	32	32	-
합 계		262,821	342,225	증) 79,404

○ 사업별 집행내역

(단위 : 원)

사 업 명	예산 배정액	노면표시 집행액		교통부속물 (관급자재)	집행잔액
		도급비	관급비
노면표시 도색 및 제거	839,000,000	839,000,000		0	0
		560,936,500	278,063,500
중앙버스전용차로흐름개선	76,316,000	49,278,000		26,014,720	1,023,280 (감배정요구)
		40,987,000	8,291,000
도로교통소통개선사업	40,429,000	36,414,480		0	4,014,520 (감배정요구)
		31,761,000	4,653,480
자전거도로 유지보수	149,140,000	99,494,420		20,006,450	29,639,130 (감배정요구)
		90,707,000	8,787,420
교통사망사고줄이기사업	7,600,000	7,501,690		0	98,310 (감배정요구)
		5,813,000	1,688,690

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비(101,224,430원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로흐름개선, 시설비(40,987,000원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(31,761,000원)

- 자전거정책과, 자전거이용 활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(90,707,000원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고줄이기사업, 시설비(5,813,000원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 붙임 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(제2회) 1부.

2. 설계변경 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.