문서번호	전산정보과-12085
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이순희		한병주	11/17 조세연
협조	주무관		서정실
	주무관		오경미

- 클라우드센터 이관에 따른 -

요금관리시스템 DB 동기화 테스트 결과 보고

2017. 11

요금관리부

[전산정보과]

- 클라우드센터 이관에 따른 -

요금관리시스템 DB 동기화 테스트 결과 보고

클라우드 이관사업의 안정적이고 체계적인 추진을 위하여 요금관리시스템의 데이터베이스(DB) 이관을 위한 동기화 테스트를 실시하고, 그 결과를 보고하고자 함

Ⅰ		추진내용 및 추진현황

▢	추진내용

❍ 요금관리시스템을 클라우드 센터에 이관함에 따라 요금관리시스템의 데이터베이스(DB) 이관시 사전 위험도 확인 및 안정적인 DB 이관을 위해 DB 동기화 테스트 추진

❍ 운영 중인 요금 DB와 클라우드센터 요금 DB 전체 테이블에 대한 데이터 건수 확인 및 실시간 변동 데이터 확인

▢	추진현황

❍ 동기화 작업 내역 : ‘17. 11. 1(수) ~ 11. 15(수)

구분	작 업 일	작 업 내 용	작업결과	문 제 점
1차 동기화	‘17.10.31.(화)	요금DB에 logging 설정	◯
	‘17.11.1.(수)	요금시스템에 OGG설치 및 구동	◯
	‘17.11.1.(수)	요금DB Export	◯
	‘17.11.2.(목)	클라우드센터의 요금DB Import	◯
	‘17.11.3.(금)	클라우드센터 동기화(OGG) 시작	⨉	OGG 솔루션을 이용한 데이터 동기화가 상수도 DB에서 추출한 데이터의 특정 Column 값을 출하지 못해 완료되지 못함
2차 동기화	‘17.11.3(금)	요금DB에 추가 logging	◯
	‘17.11.6(월)	OGG 프로세스 기동	◯
	‘17.11.6(월)	요금DB Export	◯
	‘17.11.7(화)	클라우드센터의 요금DB Import	◯
	‘17.11.8(수)	클라우드센터 동기화(OGG) 시작	◯	클라우드센터의 요금DB가 변경되어 동기화 못함
3차 동기화	‘17.11.8(수)	요금DB Export	◯
	‘17.11.9(목)	클라우드센터의 요금DB Import (11.9 18시 ~ 11.10 18시)	◯	자료확인(select)만 가능, update,insert등 변경 작업금지
	‘17.11.10(금)	클라우드센터 동기화(OGG) 시작	◯
	‘17.11.13(월)	동기화(OGG) 일부 오류 변경이력정보로 반영 후 다시 동기화(OGG) 시작	⨉	클라우드 센터의 요금DB 중 th_cm_usr_pgm_use(사용자 프로그램사용이력)이 입력되고 있어 동기화 오류 발생 → 요금관리시스템의 메뉴를 선택시 th_cm_usr_pgm_use에 사용정보 및 프로그램 정보가 입력됨
	‘17.11.15(수)	동기화(OGG) 종료	◯	데이터 확인

❍ 동기화된 자료 확인 : ‘17. 11. 10(금) ~ ’17. 11. 15(수)

Ⅱ		테스트 결과

▢	요금 DB와 클라우드센터 요금 DB 전체 테이블에 대한 데이터 건수 확인 : 정상

❍ 요금 DB 전체 테이블에 대한 데이터 건수 확인 결과 미반영 테이블이 8개 존재하지만, 동기화 프로그램에 의한 미반영된 자료가 아니므로 전체 데이터수에 대한 검증은 정상으로 확인 됨 ※세부내역은 [첨부1] 참조

총 테이블 수

정상반영

동기화 목록 제외

미 반영

707개

689개

10개

8개

- 2개 : 임의 삭제된 자료 존재

- 6개 : 11. 9(목) 요금계산시 생성된

테이블로 동기화 대상 아님

▢	요금관리시스템 단위 업무별 실시간 변동 데이터 확인 : 정상

❍ 단위업무별 실시간 변동되는 데이터 확인 결과 미반영된 자료가 없으므로

동기화 반영은 정상으로 확인됨 (대량의 변경 데이터 포함)

※ 세부내역은 [첨부2], [붙임] 참조

Ⅲ		향후 추진 일정

▢	DB 이관 및 동기화 작업 : ‘17. 11. 25 ~ 12. 15 (예정)

▢	시스템 이관 통합 테스트 : ‘17. 12. 2 ~ 12. 3 (예정)

▢	요금관리시스템 이관 오픈 : ‘17. 12. 16 ~ 18 (예정)

첨부 : 1. 전체 테이블의 데이터 건수 비교 내역 1부.

2. 단위업무별 실시간 변동자료 확인 내역 1부.  끝.

[붙임]

요금경정된 자료 반영된 화면 비교

*************************************

*

**********************************

*

*************************************

*

*********************************

*

*********************************

*

*****************************

*