문서번호	도로보수과-5880
결재일자	2017.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	성동도로사업소장
하승환	이상호	11/20 이종엽

『2017년노후포장도로정비공사(2구역)』

공 사 실 정 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11. 20.

성동도로사업소

도로보수과

공 사 실 정 보 고

[2017년 노후포장도로 정비공사(2구역)]

2017년 노후포장도로 정비 구간인 신내로외 17개 노선에 대한 시공 수량 실측하고 포장물량 증․감에 대한 조치계획에 대한 실정보고임

□ 공사개요

- 공 사 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(2구역)

- 공사기간 : 2017. 2. 23.~ 2017.11.30

- 도 급 자 : ***********장석균

- 건설사업관리 : ********************

□ 실정보고내용

○ 건설사업관리 현장실정보고서 검토보고서

- 건    명 : 실정보고서 검토결과 보고

- 문서번호 : 범한(성동)2017-91(2017.11.20.)

- 주요내용 : 노선별 실 시공물량 검측을 통한 공종별 물량 증․감 보고

○ 시공수량 증․감

연번	노선명	공사구간 (시점-종점)	규격	당초			변경				증감	비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	능률저하
계					12,400	1,209.8		12,929.7	1,395.9	112.9	186.1
1	신내로	신내지하차도앞~중랑구청사거리	T=5cm (일반)	17	500	85.0	19.4	502	97.5	4.1	12.5
2	겸재로	동원사거리~ 겸재삼거리	T=5cm (일반)	15	300	45.0	19.8	306	60.8	7.8	15.8
3	망우로	상봉역삼거리~동일로지하차도앞	T=5cm (일반)	13	500	65.0	13.7	506	69.7	7.3	4.7
4	면목로	면목역~ 사가정역	T=5cm (일반)	8	840	67.2	7.7	849	65.8		-1.4
5	겸재로	면목역사거리~동원사거리앞	T=5cm (일반)	7	520	36.4	8.5	539	46.3		9.9
6	망우로	신내지하차도~망우역교차로	T=5cm (일반)	7	410	28.7	10.1	397	40.1	7.9	11.4
7	망우로	중랑교~동일로지하차도사거리	T=5cm (일반)	10	780	78.0	7.8	792	62.4	6.3	-15.6
8	망우로	체육회사거리~중랑교전	T=5cm (일반)	3.4	130	4.5	2.8	129	3.7		-0.8
9	답십리로	장평교사거리~용마산로	T=5cm (일반)	7	400	28.0	7.3	482	35.2	1.5	7.2
10	동일로	군자교지하차도앞~장평교사거리	T=5cm (일반)	7	1,340	93.8	7.6	1,299.7	99.4	7.4	5.6
11	동일로	장평교사거리~면목교전	T=5cm (일반)	9	590	53.1	6.0	581	35.0		-18.1
12	봉우재로	중랑초교교차로~우림시장교차로	T=5cm (일반)	13.1	2,200	289.0	15.5	2,479	385.5	28.5	96.5
13	상봉로	혜원사거리~ 동원사거리	T=5cm (일반)	15	440	66.0	16.9	458	77.5		11.5
14	천호대로	군자역사거리~군자교	T=5cm (일반)	9.4	570	54.1	10.5	609	64.4	16.8	10.3
15	천호대로	군자역사거리~군자교	T=20cm(개질)	3.4	530	18.5	4.3	539.0	23.3	1.7	4.8
16	겸재로	면목2동사거리~면목역	T=5cm (일반)	13	630	81.9	17.4	707.0	123.6	8.2	41.7
17	망우로	동부시장사거리~중랑교	T=10cm(개질)	3.5	540	18.9	3.4	562.0	19.6	1.6	0.7
18	망우로	동일로지하차도앞~망우역교차로	T=10cm(개질)	6.5	1,180	76.7	7.2	1,193	86.1	13.8	9.4
19	능률저하구간					20.0				112.9	92.9

○ 개략공사비 변경

구 분	당초금액	변경금액	증 ․ 감	비고
총 공 사 비	2,739,372,620	2,825,500,000	86,127,380
도 급 비	673,372,620	777,040,000	103,667,380
관급자재비	1,349,000,000	1,594,000,000	245,000,000
이설비 및 기타	717,000,000	454,460,000	-262,540,000

□ 건설사업관리자 조치의견

○ 공사현장의 공사시행시 현장여건에 따른 증․감사항으로서

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 의한 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의한 설계변경사항으로 설계변경에 반영함이 타당함

□ 조치계획

○ 상기와 같이 예산 범위내에서 물량 증·감 사항에 대하여 건설사업관리기술자의 조치의견에 따라 우선 실정보고에 대하여 승인처리하고 추후 설계변경시 반영 정산처리하고자 함.

붙임 1. 실정보고 검토결과보고 공문  1부(별첨)

2. 건설사업관리 검토의견서(별첨). 끝.