아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 소방행정타운 공사 일정 안내

1. 소방행정타운 건립공사 1단계 사업은 11월초 현재 69%의 공정률로 진행되고 있으며, 2018년도 준공을 앞두고 있습니다.

2. 소방행정타운으로 이전하는 기관에서는 내년 업무계획 수립시 참고하시기 바랍니다.

○ 공사 일정

- 건축 준공일 : ’18. 5. 17.

※ 건축 공기 연장이 예측됨 (45일 이내 - 확정시 통보 예정)

- 기계, 전기 준공일 : ’18. 5. 30.

- 감리 준공일 : ’18. 7. 1.

※ 7월 중은 1단계 사업 “각종 사용승인절차” 진행

- 입  주 : ’18. 8월 중

- 준공식(업무개시 행사) : ’18. 9월 중.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장,119특수구조단장
담당자	이효원		단장	박정경		소방행정과장	11/20 김선영
협조자
시행	소방행정과-29883	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동, 서울소방재난본부)	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1391	/전송	02-3706-1329	/	eslon@seoul.go.kr	/	대시민공개