문서번호	도로보수과-12205
결재일자	2017.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	11/20 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제3회)

우리사업소에서 시행중인『17년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』시책사업 예산 재배정 및 본 공사 물량 증·감에 따른 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 중앙버스전용차로 흐름개선 사업 시행계획 검토 보고【9725호(‘17.9.11)】

○ 중앙버스전용차로 흐름개선 사업 작업완료 보고【11566호(‘17.11.1)】

○ 교통사고 잦은곳 개선사업(양강중) 시행계획 검토 보고【11673호(‘17.11.3)】

○ 2017년 자전거도로 유지보수 2단계 사업 시행계획 보고【11916호(‘17.11.10)】

Ⅱ		사업개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=399,980m,
도로표지병 설치 및 제거 N=620개소

○ 공사기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 29.

○ 공 사 비 : 1,314,314천원

(도급비 884,334천원, 관급비 379,665천원, 이설비 50,315천원)

○ 도 급 자 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

Ⅲ		주요공종 및 사업비 변경 현황

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수 량		비고(사유)
			당 초	변 경
1	차선(재)도색	m	372,950	276,407	- 시책사업 물량 반영 (도로표지병 설치 개소수 물량조정) 본 공사 공종별 물량 증·감 반영 (차선 도색·제거 물량조정)
2	차선제거	m	27,030	58,136
3	도로표지병 설치	개소	220	145
4	도로표지병 제거	개소	400	336

○ 사업별 예산 배정 현황 및 설계내역서(계약)

구 분	예산 배정현황 (실시설계서)	노면표시 연간단가 계약내역서 (관급비포함)	잔여금액(차액)
중앙버스전용차로 흐름개선 사업	72,859천원	27,876천원 (도급비 24,290천원)	44,983천원
교통사고잦은곳(양강중) 개선사업	3,208천원	2,687천원 (도급비 2,339천원)	521천원
‘17 자전거도로 유지보수 2단계사업	67,491천원	56,246천원 (도급비 50,325천원)	11,245천원
합 계	143,558천원	86,809천원 (도급비 76,954천원)	56,749천원

1) 각 사업별 실시설계 내역서상 구간표(물량)를 『2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』계약단가로 반영한 결과, 예산배정금액(실시설계서)과 계약단가 차이로 인해 예산 잔여금액 발생

※ 사업별 계약단가 적용 설계서 붙임참조

2) 중앙버스전용차로 흐름개선 사업(양동중학교)은 사업완료 후 별도 결과보고(붙임참조)

※ 본 공사 “교통안전시설 설치공사 실시설계 완료(규제심의)-교통운영과” 내역상 차선제거 물량이 증가되어, 기 구매한 관급자재 감 조정 및 이설비를 활용하여 차선제거 작업을 시행하고자 함.

○ 설계변경 현황(제3회)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 공사비	1,314,314,500	1,391,268,300	증) 76,953,800원
도 급 비	884,334,000	1,071,037,000	증) 186,703,000원
관 급 비	379,665,000	289,613,000	감) 90,052,000원
이설비및기타	50,315,500	30,618,300	감) 19,697,200원

※ 도급비 증액(186,703천원)

- 시책사업 도급비(76,954천원)+관급비(90,052천원)+이설비및기타(19,697천원)

Ⅳ		조치계획

○ 시책사업의 원활한 사업추진을 위해 각 사업별 실시설계 내역 물량 및 본 공사 공종별 물량 증·감, 관급자재 물량 변경을 반영하여 위와 같이 설계변경을 시행하고자 하며,

○ 추후, 현장여건변화에 따른 물량 조정(변경) 및 기타 토목사업 등 변경사항 발생시 배정된 예산 범위내에서 사용하고 최종 설계변경시 정산처리코자 함.

붙 임  1. 변경설계서(제3회) 1부.

2. 시책사업별 방침서 및 결과보고 각 1부.

3. 사업별 설계내역서(계약단가 적용) 각 1부.