문서번호	설비부-19509
결재일자	2017.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박경희	여인웅	11/20 권오식

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

2017. 11.

도시기반시설본부

설  비  부

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

「천호대로(광나루역)확장 전기공사」시행 중 현장 여건 변화에 따른 실정보고(가로등 및 신호등 설치 물량 변경)가 있어 이를 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

천호수 제2017-398호(2017.11.01.) 가로등 및 신호등 변경 승인 요청

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

공사위치 : 서울시 광진구 구의동 58-15~광장동 388-10

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2017. 12. 31.

공사내용 : 지하차도 조명등 및 가로등 설치공사 1식

도 급 비 : (총차)1,323백만원, (7차)606백만원

시 공 사 : ㈜거성전설 대표 공병준

감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

Ⅲ		검토내용

실정보고 내용

□ 본 공사와 천호대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사 구간이 일부    중복되어 가로등 및 신호등 설치물량 일부가 양 공사에 중복 설계되어 있음

- 새밭교회 앞 가로등주 3본․오랜지팩토리 앞 보행등주(보행신호용)       및 신호등주(차량신호용) 1본 중복

공사명	천호대로(광나루역) 확장 전기공사	천호대로 버스전용차로 전기공사
공사구간	광나루역역~아차산역사거리	천호대교남단~아차산역 삼거리
중복설계 내용	새밭교회앞 가로등주 설치 5본 중 3본 오렌지팩토리 앞 보행등주 2본 중 1본 오렌지팩토리 앞 신호등주 1본

□ 설계가 중복된 지점의 공사 물량에 대해서는 천호대로 신호체계의     연계성 확보를 위해 천호대로 남단~아산산역 삼거리 구간에서 시행    되고 있는 『천호대로 버스전용차로 전기공사』에서 일괄 시행함이    타당하다고 사료되며

□ 중복 설계된 물량을 본 공사에서 제외하기 위해서는 도급비 변경계약이    필요함

주요 물량변경 사항

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
가로등주 설치	h=12m	본	5	2	△3
보행등주 이설	h=4m	본	2	1	△1
신호등주 이설	h=8m	본	1	0	△1

공사비 변경 사항                                          (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
가로등주 설치비	2,743	1,097	△1,646
가로등배관 및 기타	17,722	15,978	△1,744
보행등주 이설비	1,164	582	△582
신호등주 이설비	896	0	△896
신호등 배관 및 기타	1,070	315	△755
간접공사비	14,254	11,275	△2,979
물가변동	4,600	3,754	△846
도 급 비	42,449	33,000	△9,449
관급자재비	10,195	4,329	△5,866
총공사비	52,644	37,329	△15,315

감리단 검토의견

□ 천호대로 버스전용차로 설치 전기공사에서 시행하는 중복 부분 물량을 본 공사       물량에서 제외함이 타당하다고 사료됨

Ⅳ		조치의견

책임 건설사업 관리기술자가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로       판단되어 실정보고 사항을 승인하여, 물량변경(축소) 사항을 설계변경시       반영하고자 함.

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 실정보고서 1건. 끝.