과 장		11/21 김권일	심사자	정회곤		설계자	박성근		설 계	심 사		결 재
									2017년11월20일	2017년11월21일
설 계 변 경 서(제3회)
	공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 1,314,314,500원			금 1,391,268,300원			증) 76,953,800원
	도급비	공 급 가 액			금 803,940,000원			금 973,670,000원			증) 169,730,000원
		부 가 가 치 세			금 80,394,000원			금 97,367,000원			증) 16,973,000원
		계			금 884,334,000원			금 1,071,037,000원			증) 186,703,000원
	관 급 비				금 379,665,000원			금 289,613,000원			감) 90,052,000원
	이설비 및 기타				금 50,315,500원			금 30,618,300원			감) 19,697,200원
공사개요 - 당 초 : 차선도색 L=372,950m, 차선제거 L=27,030m, 도로표지병 설치 N=220개, 도로표지병 제거 N=400개 - 변 경 : 차선도색 L=276,407m, 차선제거 L=58,136m, 도로표지병 설치 N=145개, 도로표지병 제거 N=336개