문서번호	설비부-19666
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시책사업과장		설비부장
박병환		임현근		11/22 권오식
협 조
	주무관				代박경철

『시립노원 청소년 직업 체험센터 신축공사』

설비분야 관급자재 구매계획 보고

2017. 11.

도시기반시설본부

[설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『시립노원 청소년 직업 체험센터 신축공사』

설비분야 관급자재 구매계획 보고

우리 본부에서 추진하고 있는 “시립노원 청소년 직업 체험센터 신축공사”를 위한 관급자재 구매계획을 보고 드림

1		공 사 개 요

공 사 명 : 시립노원 청소년 직업체험센터 신축 설비공사

위    치 : 서울시 노원구 노원로 16길 6-21(혜성여고 인접 부지)

규    모 : 지하1층/지상3층(연면적 3,229㎡, 대지 2,519㎡,)

용    도 : 청소년수련시설

주요설비 : 냉·난방 및 환기설비, 위생 및 소방설비, 지열 및 승강설비,

수배전 및 조명설비, 통신설비, 태양광발전설비 등

공사기간 : 2017.11.09.~2019.3.15.

공 사 비 : **************************************

2		추 진 경 과

‘14. 08.  : 노원청소년직업체험센터 추가건립 기본계획(행정1부시장 방침)

‘15. 06.   : 설계 및 공사발주 의뢰(청소년담당관)

‘17. 08.  : 설계용역 준공

‘17. 09.  : 계약심사(기계, 전기, 통신공사) 완료

‘17. 11.  : 공사 계약 및 착공(기계, 전기, 통신공사)

3		관급자재 구매계획

구매 방법 : 조달 발주

관련 규정

- 『조달사업에 관한 법률』 제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

품목별 구매 방법                              (단위 : 백만원)

분 야	품 명	소요예산	계약방법	구매 검토 의견	비 고
기 계	냉난방기(EHP)	***	다수공급자	단가 계약 제품 구매	‘17년 발주
	냉난방기(GHP)	**	다수공급자	〃	〃
	전열교환기	**	3자단가	〃	〃
	자동제어(전력,조명포함)	***	총액 계약	조달 우수 제품 구매	‘17년 차수 발주
	엘리베이터	**	다수공급자	단가 계약 제품 구매	‘18년 발주
	부스터펌프	*	3자 단가	〃	〃
	물 탱 크	**	〃	〃	〃
	지열 설치	***	총액 계약	조달 우수 제품 구매	‘17년 차수 발주
	계	***
전 기	수배전반	***	3자 단가	단가 계약 제품 구매	‘17년 발주
	비상발전기	**	3자 단가	〃	‘18년 발주
	태양광발전	**	다수공급자	〃	〃
	LED조명등	**	다수공급자	〃	‘17년 발주
	무대설비	**	총액 계약	조달 우수 제품 구매	‘18년 발주
	계	***
통 신	전관방송설비	***	3자단가	단가 계약 제품 구매	‘17년 발주
	CCTV	**	〃	〃	〃
	통신배선반	**	총액 계약	조달 우수 제품 구매	‘18년 발주
	계	***

보고자 의견

- ‘17년 당해 예산의 불용 방지를 위하여 관급자재를 조속히 발주하여 공정관리에            만전을 기하고자 함.

4		향 후 계 획

2017. 11. ~ 2018. 02. : 관급자재 발주 및 계약

2019. 03. : 납품완료.

붙임  보고서 1부. 끝.