＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	예산 추가배정 요청(이수고가차도~사평지하차도간)

1. 우리사업소에서 시행중인 “이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사”와 관련하     여 아래와 같은 사항이 발생하여 예산 추가배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사

나. 계약금액 : 2,170백만원

다. 공사기간 : 2017. 6. 8. ~ 2017. 12. 4.

라. 계 약　자 :　고황엔지니어링(주) 이경욱

마. 추가 소요예산 : 시설비 100백만원 (공사비)

시설부대비 150,000원(외부전문가 수당)

사. 추가요청사유 : 시공물량 증가 및 기존관(900mm, 700mm) 폐쇄 충진공 물량증가 등

외부전문가 예비준공검사 수당

첨부 :  설계 변경 내역서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	강희창		주무관	제영도		시설관리과장	전결 11/22 박은선
협조자
시행	시설관리과-25971	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	대시민공개