문서번호	교량안전과-21155
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장
백운경	유제천	11/22 한유석

한강상 PSC교량 안전강화공사(서강대교)

실정보고(2차) 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

교량안전과

한강상 PSC교량 안전강화공사(서강대교)

실정보고(2차) 검토

한강상 PSC교량 안전강화공사(서강대교)에 대해 책임건설사업관리기술자가 제출한 실정보고(2차)에 대한 검토 보고 임.

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사(서강대교)

공사기간 : 2017. 5. 31 ~ 2017. 11. 26

공사개요 : 아스팔트 포장 138.72a, 교면방수 13,872㎡

공 사 비 : 1,601,039천원

(도급비 1,232,554천원, 관급비 306,518천원, 폐기물처리비 61,967천원)

시 공 사 : 고황건설(주)

감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 2

Ⅱ		보고내용

가. 2차텐던 정착부 2중 방수 시행 반영 (현장 지시사항)

○ 교량 2차 텐던 정착부 시공이음부 등 1차 방수 후 전체 2차 방수 시행

- 규       모 : A=107.25㎡  ( 1.1×1.5m×65개소= 107.25㎡ )

- 소요 공사비 : 당초  0천원   → 변경 6,053천원  ( 증 6,053천원)

< 정착구 위치도  >

정착구 65개소 ; 상류교 33개소, 하류교 32개소 ( B=1.1m, L=1.5m,  A=107.25㎡ )

< 현황사진 >

하류교 P17~P18 NO.16 정착구 방수공사 전	하류교 P17~P18 NO.16 정착구 1차 방수 후

나. 시공일수 조정에 따른 수량변경

○ 교통정리원 및 안전시설물 설치․해체, 싸인보드 실 작업일수 반영

- 야간작업일수 감소 ( 34일 → 25일 )

- 공사비 변경내역 : 당초 26,754천원 → 변경 20,242천원, 감)6,512천원

다. 정산대상 경비 실 정산

○ 건강보험료, 노인장기요양보험, 연급보험료, 산업안전보건관리비,

퇴직공제부금, 환경보전비, 건설하도급대금지급보증서 발급수수료,

건설기계대여금지급보증서 발급금액

- 공사비 변경내역 : 당초 67,935천원 → 변경 9,663천원, 감)58,272천원

라. 관급자재 및 폐기물 수량 정산

○ 내유동성 아스콘

- 당초 3,292톤  → 변경 3,224톤  감) 68톤

- 공사비 변경내역 : 당초 306,518천원 → 변경 300,203천원, 감) 6,315천원

○ 폐기물

- 아스콘평삭재  : 당초 2,062톤  → 변경 2,657톤  증) 595톤

- 혼합폐기물  : 당초 688톤  → 변경 991톤  증) 303톤

- 공사비 변경내역 : 당초 61,966천원 → 변경 99,318천원, 증)29,352천원

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 현장 작업 지시한 PSC 2차  텐던 정착구 부분 2회 방수시공 및 제경비 정산과, 관급자재, 건설폐기물 수량변동에 대하여 설계변경시 정산(감27,694천원) 반영조치코자 합니다.

- 당초 463,173천원  →  변경 435,479천원   감 27,694천원

붙임 : 1) 건설사업감리단 실정보고 관련공문 1부. 끝.