문서번호	도로보수과-11509
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		김학동	11/22 신응수
협조

2017년 노후포장도로 노면표시 설치공사 (2구역) 설계변경(제1회,정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

설계변경(제1회,정산) 검토 보고

[ 2017년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가) – 2구역 ]

우리사업소에서 시행중에 있는『2017년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가)-2구역』에 대하여 시공물량 증․감에 따른 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 내용을 보고 함.

공사현황

❍ 공 사 명 : 2017년 노후포장도로 노면표시 설치공사(연간단가)-2구역

❍ 공사개요 : 차선도색 61,740m

❍ 공사기간 : 2017. 03. 08. ~ 2017. 11. 30.

❍ 계 약 자 : ***************

❍ 계약금액 : *************

관련근거

❍ ***********************************

설계변경 사유

❍ 노면표시 시공물량 증 ․ 감에 따른 공종별 수량 조정

설계변경 내용

❍ 공사비 변경

구 분		설계변경 금액(원)		증 ․ 감(원)	비 고
		당 초	변 경
총공사비		228,655,800	491,250,000	증262,594,200
도급액	공급가액	140,076,182	310,909,091	증170,832,909
	부가세	14,007,618	31,090,909	증17,083,291
	계	154,083,800	342,000,000	증187,916,200
관급자재비		74,572,000	149,250,000	증74,678,000
이 전 비		0	0	0

❍ 주요공정 변경 내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감		비고
백색실선	수동식	m	6,060	11,127	증)	5,067
백색파선	수동식	m	6,480	11,609	증)	5,129
황색실선	수동식	m	16,600	33,609	증)	17,009
황색파선	수동식	m	3,210	8,104	증)	4,894
청색실선	수동식	m	3,150	668	감)	2,482
청색파선	수동식	m	540	780	증)	240
문자/기호	수동식	m	10,180	29,081	증)	18,901
횡단보도	수동식	m	15,500	33,627	증)	18,127
제거	수동식	m	20	252	증)	232
합 계		m	61,740	128,857	증)	67,117

조치계획

❍ 감리사로부터 제출된 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과 계약수량 대비 시공물량 증 ․ 감 사항이 적정하므로, 상기 내용과 같이 설계변경(1회)을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 변경설계서(1회) 1부.  끝.