투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경 제출 승인 회신-월드컵대교 북단 연결도로 전기공사)

1.업무지시현장 :  월드컵대교 북단 연결도로 전기공사 주식회사 포스코건설

2.작 성 일 자 : 2017-11-23 16:11:06

3.지 시 내 용

가. 월드컵(감리)2017-653호(2017.11.22.)와 관련입니다.

나.“월드컵대교 북단 연결도로 전기공사(2차)” 와 관련하여 설계변경 제출에 대하여     설계변경 내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행     (준공) 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 설계변경 승인내용

- 당초 : 237,398,000원, 변경 : 240,680,000원

- 증감액 : 증)3,282,000원.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							호정오			건축설비과장					11/23 김은덕
협조자
시행			설비부-19809									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개