문서번호	도시철도토목부-15222
보존기간	1년
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	궤도과장	도시철도토목부장
한재호		조규양	최진규	11/23 김진팔
협조

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

고속도로 공사안내표지판 설치 실정보고

2017. 11.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

고속도로 공사안내표지판 설치 실정보고

서울외곽순환고속도로 하부를 통과하는 하남선(5호선 연장) 터널 시공에 따른 공사안내표지판 설치에 대한 검토 보고임

※ 관련문서 : 하남 제17-759호(2017.08.29.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소

○ 공사기간 : 2015.03.30.~2019.03.28.

○ 도 급 액 : 71,409백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사

2		실정보고 내용

○ 추진현황

- `16.06.27 : 비관리청공사 허가 신청(본부 ⇒ 한국도로공사 수도권본부)

- `16.06.30 : 비관리청공사 시행 허가(한국도로공사 수도권본부 ⇒ 본부)

○ 허가조건

- 제22항 : 공사 착수 전 비개착공사 안내표지를 고속도로상에 설치

설 치 장 소	규격 및 문안(예)
● 비개착 공사구간 5m 전방 고속도로 길어깨(양방향)

○ 소요 공사비 현황

[단위:원]

구 분	단위	수량	공 사 비	비 고
공사 안내표지판 설치·철거	개소	1	8,002,493	※ 하남선 1-1공구 : NTR구간 1개소 설치 하남선 1-2공구 : 입출고선 구간 1개소 설치
제 경 비			797,507
도 급 금 액			8,800,000
관급자재비(레미콘)	㎥	2.70	190,000
폐기물처리비	ton	6.0	100,000
총 공 사 비			9,090,000	증)9,090,000

※ 단가 적용 : 협의율 87.745% 적용

3		관리단 검토의견

○ 한국도로공사의 비관리청공사 허가조건 이행에 따른 실정보고 검토로서

○ 단가 검토결과 적정한 것으로 판단되며 산출된 소요공사비(증9,090천원)는 추후 설계변경 심의를 거쳐 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

4		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 비관리청공사 허가조건인 공사 안내표지판 설치·철거에 대해서는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 향후 설계변경시 정산 반영하고자 함

- 공사비 증액 : 9,090천원

공사 안내표지판 설치 현황사진
[ 표지판 설치 전 ]		[ 표지판 설치 후 ]

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부. 끝.