문서번호	한양도성도감-11984
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		신추교	11/23 심말숙
협조

<한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사> 설계변경 계획

2017. 11.

한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사 설계변경 계획

한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사에 대해 다음과 같이 변경사항이 있어 계약금액을 변경하고자 함

사업개요

○ 사 업 명 : 한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사

○ 사업기간 : `17.6.30. ~ `17.11.30.

○ 수행기관 : ㈜한빛안전기술단(대표:조용선, 070-4895-1191)

○ 계약금액 : 금11,500,000원

변경사항

○ 계약금액 변경 : 금11,500,000원→금11,425,000원(75,000원 감액)

○ 변경사유

- 잔디떼붙임 삭제 : 현장 여건상 잔디 식생 불가

- 제수변 T핸들 추가 : 제수변 밸브개폐시 필요(제수변 깊이 : 지중 1m)

○ 변경 내역

구분		당초	변경	증감	비고
순공사원가	재료비	7,818,337	7,801,537	△16,800	제수변T핸들 추가 잔디떼붙임 삭제
	노무비	1,389,623	1,349,710	△39,913	잔디떼붙임공 삭제
	경비	719,473	713,582	△5,891	재료비 및 노무비 변경으로 적용 요율 변동
순공사비 계		9,927,433	9,864,829	△62,604
일반관리비		357,387	355,133	△2,254	3.6%(순공사원가계)
이윤		170,187	166,871	△3,316	6.9%(노무비+경비+일반관리비)
부가가치세		1,045,500	1,038,683	△6,817	10.0%
총공사비		11,500,000	11,425,516	△75,000	천단위절삭

보고자 의견

○ 설계도서 검토 결과 및 현장 여건을 반영한 내역으로, 원활한 사업 추진을 위해 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 설계변경 세부 내역서 1부.  끝.