문서번호	치수과-20327
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	김익기	송기민	11/23 代이상수
협 조

절개지 등 상부 주택가 주변도로

하수시설물 긴급공사 추진계획

2017. 11.

안전건설교통국

(치 수 과)

절개지 등 상부 주택가 주변도로

하수시설물 긴급공사 추진계획

장마철 집중호우로 인해 2017.07.03.일자 정릉동 중앙하이츠빌 1차아파트 화단담장 붕괴 등 재난피해 발생에 따라 확보된 2017년 추경예산을 활용하여 우수처리 부족, 토사유실 우려가 있는 주택가 인접 절개지, 사면, 주변 도로에 배수시설 등 하수시설물 보강공사를 시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

2017년도 제1회 추가경정 예산 확정 : 기획예산과-12426(2017.09.26.)호

- 대상사업 : 절개지 등 상부 주택가 주변도로 하수시설물 긴급 정비공사

- 예 산 액 : 200,000천원

- 예산과목 : 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량 확충, 하수관 개량공사 시설비 및 부대비, 시설비(206-401-01)

Ⅱ		사업대상 검토

【 사업대상 1 】

위    치 : 정릉2동-정릉중앙하이츠빌 1차아파트 주차장 상부 주변 도로

현    황 : 장마철 우기시 정릉중앙하이츠빌 1차아파트 102동 앞 주차장 화단 상부 도로로부터 노면수가 유입되어 토사가 유실되므로써 2017.07.03.  화단담장이 붕괴되는 재난사고가 발생하였음.

검토의견 : 현장조사 결과 주차장 상부 주택가 도로에는 배수로나 빗물받이 등 노면수 처리를 위한 시설이 없어 토사유실로 인한 지반침하나 붕괴 우려가 있으므로 하수관로, 빗물받이 등 하수시설물 보강이 필요함.

위치도 및 현장사진

위 치 도	현 장 사 진

【 사업대상 2 】

위    치 : 종암동-종암로27길90 주변 절개지 하부도로

현    황 : 종암로27길90 주변 개운산은 주택건설사업을 위한 굴착으로 광범위한 절개지가 노출되어 있는 상태로 상부의 우수유출로 우기시 인근 도로에 노면수 유입량이 많아 측구수로를 설치하였으나 노후 파손으로 시설 기능이 저하되고 사고위험이 있어 오중균 구의원이 정비를 요청함.

검토의견 : 현장조사 결과 정비 대상지는 개운초등학교 어린이보호구역내 통학로로 측구수로의 상판 균열과 구조물이 파손되고 보행안전휀스는 부식, 훼손된 상태로 사고를 예방하고 환경개선을 위하여 긴급 정비가 필요함.

위치도 및 현장사진

위 치 도	현 장 사 진

【 사업대상 3 】

위    치 : 석관동-돌곶이로22가길 3-8 일대

현    황 : 인근 지역 신축공사장의 중차량 통행으로 인한 충격 영향과 노후한 도로포장, 하수관에 의한 침하로 도로표면 균열 발생이 추정되어 지역주민, 김태수 구의원이 원인파악 및 긴급보수를 요청함.

검토의견 : 하수관로 현장조사결과 내부 종방향 균열, 관이음부 이격, 노후 파손으로 도로동공 발생 우려가 있으며 하수관로 구배불량으로 하수처리가 원활하지 못하여 하수관로 긴급 정비를 요함.

위치도 및 현장사진

위 치 도	현 장 사 진

Ⅲ		공사 시행계획

정릉중앙하이츠빌 1차아파트 주차장 상부 주변 도로

- 이중벽관 부설 : D250~450mm, L=35m

- 빗물받이 설치 : 400×1000, 3개소

- 맨홀 설치 : 1호, 1개소

- 개략 공사비 : 30,000천원

종암로27길90 주변 절개지 하부도로

- 사각수로관 부설 : D300mm, L=140m

- 빗물받이 설치 : 400×1000, 2개소

- 디자인휀스 설치 : 1.0×2.0, 73경간

- 미끄럼방지포장 : 6.5a

- 아스팔트 평삭 및 포장 등

- 개략공사비 : 100,000천원

돌곶이로22가길 3-8 일대

- 흄관 부설(D450mm) : 104m

- 맨홀(1호) 설치 : 6개소

- 횡단빗물받이(2호) 설치 : 7개소

- 개략공사비 : 70,000천원

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 2017년 1차 추경예산 사업으로 추진하는 절개지 등 상부 주택가 주변도로 하수시설물 긴급보수 건에 대하여 우리구에서 시행중에 있는 『2017년 관내 1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』에 작업지시하여 보수공사를 시행하고 추후 설계변경에 반영하여 정산처리코자 함.

붙 임 : 공사계획 평면도 각 1부.끝.