투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계) 설계변경(총차4회,2차1회) 시행 및 변경계약 의뢰

1. 방재시설부-제19589호(2017.11.17.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』와 관련하여 다음과 같이 설계변경(총차4회,2차1회) 시행에 따른 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)

나. 계약금액 : 금3,804,900,000원 (2차 금24,200,000원)

다. 공사기간 : 2017.01.02. ~ 2018.06.30. (2차 2017.11.01.~2018.06.30.)

라. 계 약 자 : 유호산업개발(주) (대표 유정환)

마. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	총차	금 3,804,900,000원	금 5,663,900,000원	증) 1,859,000,000원
	2차	금 24,200,000원	금 1,883,200,000원	증) 1,859,000,000원
공사기간	총차	‘17.01.02. ~ ‘18.06.30.	‘17.01.02. ~ ‘18.06.30.	(변경없음)
	2차	‘17.11.01. ~ ‘18.06.30.	‘17.11.01. ~ ‘18.06.30.	(변경없음)

- 변경사유 : 계약심사 결과 반영 등에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 경춘선 폐선부지 공원조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 방침서 1부. / 2. 감리단 설계변경 검토보고 및 변경내역서 각1부.

3. 계약금액조정 검증대장 1부. / 4. 합의각서 1부. 끝.

							방재시설부장
주무관							윤석채			공원시설과장					김인숙					방재시설부장					11/17 남궁용
협조자				주무관						김자환					경리과장							최정수
시행			방재시설부-19623									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3780-8684						/전송			02-3780-8756					/	kissinger79@seoul.go.kr												/	부분공개(5)