문서번호	건축부-19870
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
이호경		박범규	11/17 김진용
협조
	주무관		김은진

『정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역』

준공기한 연장(2차) 검토보고

2017.  11.

도시기반시설본부

(건축부)

『정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역』

준공기한 연장(2차) 검토보고

『정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역』의 설계용역 중단(재투자심사)으로 인한 준공기한 연장 검토보고 드림

□  관련문서

○ 건축부-8082(2017.5.12.)호:『정릉차고지 설계용역 진행 협조 요청』

○ 건축부-8675(2017.5.22.)호:『정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역』진행 협조 요청

○ 주차계획과-4988(2017.10.20.)호: 정릉동 공영차고지 건설관련 투자심사 결과 알림

○ oom 17-006(2017.11.16.)호:『정릉동 공영차고지 건립공사 설계용역』재투자심사 기간에 따른 용역기간 연장 및 추가 설계용역비 요청

□  설계용역 중단 및 준공기한 연장사유

○ 사업의뢰부서(주차계획과) 재투자심사(사업비 83.6억 →132.3억)로 인한 설계용역 중단 : 151일(2017.5.22.~2017.10.19.)

○ 재투자심사 조건 반영 : 70일

- 심사결과 : 지역주민의 수용와 선호를 반영한 문화시설 활용계획과 공사기간중 대체 박차계획을 수립 보완하여 사업 추진

- 지상 문화시설(성북구, 市 문화시설과) 및 지하 버스박차고 설계 재협의 : 40일

- 협의 결과 기본설계 수정 : 30일

○ 경관심의, 공용건축물, 설계VE, 특수구조심의 등 절차 이행 등 실시설계 : 113일

- 실시설계 수정 : 53일                      - 심의, 협의 소요기간 : 60일

○ 잔여 설계용역기간 : 41일 (2017.10.20.~2017.11.30.)

※ 설계용역 계약 : 주차계획과 / 설계용역진행 : 건축부

□ 설계자 요청사항

○ 사업의뢰부서 재투자심사 결과 반영을 위한 계약변경요청

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
준공기한	2017. 11. 30	2018. 4. 21	142일 연장	추가설계 용역비
설계비	432,800,000원	513,600,000원	80,800,000원

※ 추가설계용역비는 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준‘ 에 근거하여 녹색건축, 녹색건축 수수료. BF인증 수수료, 지반조사비, 측량비, 토양환경평가

《 사 업 개 요 》
-	위치	:	성북구 정릉동 771-7
-	규모	:	지하1층 / 지상2층, 부지면적 3,600㎡, 건축연면적 4,126.8㎡
-	세부시설	:	차고지, 문화복합시설, 사무실 및 근린생활시설 등
-	총사업비	:	124.6억원(공사비 109억, 설계비 4.3억, 감리비 10억등)
-	설계자	:	오오엠건축사사무소
-	설계비	:	432,000,000원
-	용역기간	:	`16. 8 ~ `17. 11

□ 추진경위

○ 2014.08.07. : 정릉동 친환경 공영차고지 건립계획 수립(주차계획과)

○ 2016.05.02. : 설계공모 당선작 발표(도시공간개선단)

○ 2016.08.04. : 설계용역 계약 체결(주차계획과)

○ 2016.08.18. : 기본 및 실시 설계의뢰(주차계획과 → 건축부)

○ 2016.10.25. : 도시기반시설본부장 설계보고(건축부)

○ 2017.03.08. : 건설기술심의(조건부가결)

○ 2017.05.22. : 재투자심사에 따른 용역 중단

○ 2017.05.25. : 1차 용역기간 변경 계약(준공일 ‘17.5.30→’17.11.30)

○ 2017.10.20. : 재투자심사 결과(조건부추진)에 따른 용역 재개

□ 검토의견

○ 재투자심사 결과에 따른 설계용역 기한연장 및 계약변경 요청사항이 타당하다고 판단됨

□ 행정사항

○ 용역기간 연장 계약 사업의뢰부서(주차계획과) 시행

○ 추가설계용역비 사업의뢰부서(주차계획과) 검토 시행

붙임 : 관련 공문 각 1부.  끝.