문서번호	건축부-19868
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장	시설국장
김찬유	박범규	김진용	11/17 류훈
협 조
	상상산업팀장		고옥희
	조경시설과장		신용우
	열빛총괄과장		유병기

『서울애니메이션센터 재건축 공사』

설계용역 기간연장 검토보고

2017. 11.

도시기반시설본부(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

『서울애니메이션센터 재건축 공사』

설계용역 기간연장 검토보고

「서울애니메이션센터 재건축 공사」설계용역과 관련하여 설계자로부터 용역기간 연장(사유 : 사업변경계획)요청되어 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역현황

□ 용 역 명 : 서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역

□ 위    치 : 중구 소파로 126, 130

□ 규    모 : 지상3층, 지상3층, 연면적 21,0000㎡

□ 주 용 도 : 개별 창작공간, 마켓컨벤션 등(복합용도)

□ 용 역 자 : ㈜공간종합건축사사무소

□ 용역금액 : 2,072,000천원

□ 용역기간 : 2017.02.24. ~ 2017.12.20

Ⅱ		추진경위

□ 2015.10.15. : 서울애니메이션센터 재건축 계획 수립

□ 2016.11.07. : 설계공모 당선작 선정(설계자 : 공간종합건축사사무소)

□ 2017.02.24. : 설계용역 계약 및 착수

□ 2017.03.16/13 :시장님 재건축 디자인 변경 요청

서울애니메이션센터의 의미와 기능에 맞게 외형이 보다 애니메이션적인 느낌이

나고 꿈과 상상이 표현되어야 함

□ 2017. 3월 ~ 7월 : 총괄건축가(4회)·외부전문가(3회) 자문 및 회의

□ 2017.07.19. : 시장님 재건축 외부디자인 컨셉 보고

□ 2017. 7월 ∼ 9월 : 문화재 표본조사 및 지반조사

□ 2017.11.04. : 서울애니메이션센터 재건축 사업 변경계획(시장방침)

□ 2017.11.07. : 사업 변경계획 통보 및 용역기간 연장 요청(건축부)

□ 2017.11.15. : 설계용역 기간 연장 요청(공간종합건축)

Ⅲ		용역기간 연장 검토

□ 관련근거

- 서울애니메이션센터 재건축사업 변경계획 방침(문화융합경제과-8131호, 2017.11. 4)

- 용역기간 연장 요청 건(공간 제2017-0639호, 2017.11.10.)

□ 용역기간 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘17.02.24 ~ ’17.12.20	‘17.02.24 ~ ’18.12.20	증 365일

- 조정사유 : 설계 예정공정표(붙임 참조)

※ 사업변경계획에 따른 공사비 63억 증가(당초 436억 → 변경 499억)

설계용역비 4.5억 증가(당초 2,072백만원 → 변경 2,522백만원)

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처리의견

□ 위 용역기한 연장 검토 내용과 같이 준공기한을 연기 처리

□ 설계용역비 증가 예산 사업의뢰부서(문화융합경제과)예산 확보 요청

붙 임 : 1. 설계용역기간 연장 요청 공문(설계자) 1부.

2. 서울애니메이션센터 재건축 사업 변경계획 공문(문화융합경제과) 1부.  끝.