투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약-한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험

1. 수상안전과-5499(2017.11.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험 용역」아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	한강르네상스호 주기관 및 발전기 안전시험 용역
계약상대자	******************
계 약 금 액	**********************, 부가세 포함
계약/착수 일자	2017.10.27. / 2017.10.30.
용 역 기 간	2017.10.30. ~ 2017.11.23.

나. 변경내역 : 용역기간 변경

변 경 내 역	변 경 전	변 경 후
용 역 기 간	2017.10.30. ~ 2017.11.23.	2017.10.30. ~ 2017.12.19.

다. 변경사유 : 검사관의 지적사항 발생으로 조치 후 안전검사 실시 예정

붙  임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 계약서, 준공기한 연기의뢰서, 수리보완요청서(KST) 각 1부.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	박병현		총무부장	11/20 박기용
협조자
시행	총무과-19251	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0719	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)