문서번호	건축부-19904
결재일자	2017.11.20.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장		시설국장
정호기	조영수	김진용		11/20 류훈
협 조
	사업기획팀장		박희원

「마곡산업단지 공공산업지원시설건립」

설계용역 기간연장 검토 보고

2017. 11.

서울특별시 도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

「마곡산업단지 공공산업지원시설건립」

설계용역 기간연장 검토 보고

「마곡산업단지 공공산업지원시설건립 설계용역」의 기본설계 경제성검토(VE)시 제시된 의견반영(평면계획 전면변경)을 위한 용역기간 연장요청이 있어 검토보고 드림

Ⅰ		용역현황

□ 설계용역 개요

- 계  약  명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설건립 설계용역

- 위     치 : 강서구 가양동 마곡산업단지 D28-2

- 공사 개요 : 지하4층 지상8층, 연면적 21,951㎡, 업무시설

- 설 계 자  : ㈜스페이스연(건) 이상대

- 계약금액  : 2,200백만원

- 설계용역기간 : 2016.11.28. ~ 2017.11.22

□ 추진경위

- `16.11.28 : 설계용역 착수

- `17.08.14 : 경관심의 완료

- `17.09.13 : 기본설계 VE의뢰(건축부 → 계약심사과)

- `17.11.08 : 설계경제성검토 결과통보(계약심사과 → 건축부)

Ⅱ		설계용역 기간 연장 사유

□ 용역기간 연장요청 사유

- 계약심사과에서 실시한 기본설계 경제성검토(VE)결과를 반영(평면계획 전면변경)을 위한 설계기간 확보.

- 기본설계 주요변경사항 : 코어위치 변경 등

구 분	당초	변경	비 고
평면계획	core 남측위치	core 동측위치	VE채택제안 1번 건축분야:1~17번
친환경인증	녹색건축인증(최우수)	녹색건축인증(우수)
설비기준	공공청사 수준	임대사무실 수준

Ⅲ		용역기간연장 검토

□ 근  거

- 지방자치단체 용역계약 일반조건 제8절 2. 계약기간의 연장

□ 용역기간 연장내용

※ 사업의뢰(서남권사업과)와 협의(2017.11.07.)하여 2018. 4. 22.까지 실시설계도서는 최종납품되도록 조정됨.(붙임 2 참조)

구 분		당 초	변 경	비 고
용역기간	총차	‘16.11.28 ~’17.11.22 (360일)	‘16.11.28 ~’18.04.22 (511일)	증 151일 (기본설계 2월, 실시설계 3월)

□ 연기사유 귀책사유 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처리의견

□ 위 용역기한 연장검토 내용과 같이 준공기한을 연기코자함.

붙임 : 1. 설계용역기간 연장요청 공문 1부.

2.『공공산업지원시설 건립』설계용역기간 연장요청에 따른 의견회신 1부.

3. 설계경제성 검토결과 통보

4. VE 채택제안 목록 66건 1부.

5. 설계 변경일정표 1부.  끝.