문서번호	누수방지과-10896
결재일자	2017.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
문성원		유승효	11/20 강신재
협조
	주무관		차경호

『유량감시시스템 공정유량계 WEP(웹) 구축 용역』

중간보고회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

상수도사업본부

(누수방지과)

『유량감시시스템 공정유량계 WEP(웹) 구축 용역』

중간보고회 결과 보고

용역 개요

◯ 용 역 명 : 유량감시시스템 공정유량계 WEB(웹) 구축 및 시스템 기능개선

◯ 용역기간 : ’17. 8. 31.~’17. 12. 18.

◯ 용역개요

- 정수센터 공정유량계(39개소) 유량감시시스템 구축

- 수도사업소 14개소의 압력 및 수위에 대한 유량감시시스템 구축

- 유량감시시스템 모니터링 보고양식 및 감시화면 수정 및 개발

보고회 내용

◯ 일  시 : 2017. 11. 15.(수) 15:00~16:00

◯ 장  소 : 상수도사업본부 시설안전부 회의실

◯ 참석자 : 용역사 엔지니어 2명, 본부 담당 2명

◯ 용역 진행 현황

공정명	진행사항	공정률	완료예정일
정수센터 공정유량계 전송프로그램 개발 설치	- 광암,구의,뚝도 완료 - 암사,영등포,강북 프로그램 설치 진행 중	70%	11. 24.
수도사업소 14개소 압력 및 수위 구축	중부, 남부, 강남 완료 서부, 동부, 강서 진행중	50%	11. 24.
통합정보센터 중계서버 HMI 프로그램 수정 개발	통합제어실 설치 진행 중	70%	11. 30.
유량감시시스템 WEB 서버 구축	- 용역사 회사 PC에서 작업 진행 중 90%이상 작업 후 유량감시시스템에 설치하여 마무리 작업 진행 예정	70%	12. 1.
유량감시시스템 모니터링 보고양식 및 감시화면 수정	- 용역사 회사 PC에서 작업 진행 중 90%이상 작업 후 유량감시시스템에 설치하여 마무리 작업 진행 예정	80%	12. 1.

◯ 추진 협의 내용

- 정수센터 기타공정유량계의 유용한 관리를 위해 공정계통도 웹에 표시하고, 관리대장 입력창 추가설치토록 협의

- 공정계통도 작화 시안 중 색, 기호 등 일부 변경, 보완 협의

- 작업기한 15일전 모든 작업 완료하고 시험운영 진행 하도록 협의

《보고회 사진》

향후일정

◯ 2017. 11월 : 유량감시시스템 공정유량계 구축 용역 모든 공정 설치 완료

◯ 2017. 12월

- 유량감시시스템 웹 구성여부 및 데이터 정상작동 여부 점검

- 최종 검수(교육 포함).  끝.