아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약(변경) 의뢰(교량 터널 통합관리센터 구축용역)

우리과에서 시행중인『교량 터널 통합관리센터 구축용역』에 대하여 다음와 같이 계약(변경)의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 교량․터널 통합관리센터 구축용역

나. 용역기간 : 2017.6.16 ~ 2017.12.12

다. 용 역 비 : 1,220,000,000원

라. 계 약 자 : ㈜유신, ㈜주인정보시스템

마. 변경내용

- 계약금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	1,220,000,000	1,570,000,000	증) 350,000,000

- 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용역기간	2017.6.16~2017.12.12	2017.6.16~2018.4.12	증) 4개월

바. 변경사유

- 계약금액(도급비) 변경

시범운영(검증, 보완 등) 효과 극대화를 위해 남부 및 성동도로사업소 소관 시설물의 통합관리센터 연계 필요(남부 및 성동 연계시 6개 도로사업소 전체 통합관리센터로 연계)

- 준공기한 연장

․통계데이터담당관에서 추진 중인 “디지털 시민시장실 구축(2단계) 용역” 추진일정(‘18년3월말 완료예정)에 맞춰 정보연계 등 작업 필요

․사업추가에 따른 통합플랫폼 및 시스템 설치, 사업소와 구청간 자가망 설치 등 소요기간(4개월) 확보 필요 등

사. 예산과목

- (도시개발특별회계)도로시설물관리, 도로시설물운영, 교량 터널 통합관리센터 구축, 시설비(205-401-01)

- (도시개발특별회계)도로시설물관리, 도로시설물운영, 시설물 안전점검 및 진단,

시설비(205-401-01)

붙 임 : 1. 검토보고 방침 1 부.

2. 내역서(변경) 1 부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1 부.

4. 합의각서 1 부. 끝.

	도로시설과장
주무관	이정국		시설기획팀장	김성기		도로시설과장	11/20 박상돈
협조자	계약1팀장	代정항교
시행	도로시설과-13947	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청별관1동 2층 도로시설과	/
전화	2133-1653	/전송	2133-1078	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개