투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 및 재계약 의뢰(도림천1복개보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 “도림천1복개보수공사”에 대해 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 재계약 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 도림천1복개보수공사

나. 공사기간 : 2017.06.22. ~ 2017.11.30.

다. 도 급 자 : *********김인식

라. 계약변경내용

구 분		변 경 내 용
계약금액	당 초	금513,514,000원
	변 경	변경없음
계약기간변경	당 초	2017. 06. 22. ~ 2017. 11. 30.
	변 경	2017. 06. 22. ~ 2017. 12. 31.

마. 준공기간연기사유 : 붙임참조

붙 임 : 1). 준공기한 연기의뢰서 1부

2). 준공기한 연기검토보고  1부

3). 관련공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박종헌		시설보수과장	11/21 권태선
협조자	주무관	신동헌
시행	시설보수과-5219	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	pjh0368@seoul.go.kr	/	부분공개(6)