문서번호	도로관리과-18943
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	11/21 배광환
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 공정회의(10월) 결과 보고

2017. 11.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 공정회의(10월) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’17.11.14(화) 16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017년 2단계, 3단계 월간보고

○ 참    석 : 도로굴착관리팀장, 업무담당 2명

(업체) 지케이엔지니어링(17-2), 광성지엠(17-3)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’17.10.31 기준)

구분	계획연장	탐사연장	분석연장	분석동공	제척(GPR)	천공	동공발견	적중률 (미달포함)
계	1,985㎞	1,410㎞	1,302㎞	1,166	186	906	742	81.9% (89.7%)
1단계	980㎞	980㎞	980㎞	794	129	665	546	82.1% (90.1%)
2단계	540㎞	371㎞	263㎞	254	17	163	133	81.6% (84.7%)
3단계	465㎞	59㎞	59㎞	118	40	78	63	80.8% (97.4%)

□ 공정회의 주요내용

○ 공통

- 동절기 및 한파 대비 작업자 안전장비, 안전용품 지급 및 교육 철저

- 지하매설물 위치확인 및 천공전 현장조사 철저히하여 안전사고(지하매설물 손상 등) 예방 철저

- 공정관리를 위하여 장비 및 인력 검토 및 투입

○ 2단계 추진실적 관련

- 공정 확인결과 현재 발견량은 km당 0.45개로 목표 동공발견 기준(km당 0.58개)에 미달하므로 동공발견 목표량을 확보할 수 있는 만회대책 수립 제출

- 동공내부 흙 유실속도 실험시 현장상황을 사실적으로 기술하고 물 주입시 어떤 상황을 가정한 것인지 기준 설명

○ 3단계 착수보고 관련

- 추가과업 시행전 실험 계획서 사전 협의 후 실시

- 물과 관련된 실험은 땅이 얼기전 조속히 시행

※ 회의 전경

별도 : 보고자료 2건(출력물).  끝.