투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 내용알림(봉제박물관 건립공사, 철근콘크리트공사)

1. 시봉*******78(2017.11.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『봉제박물관 건립공사』의 하도급(철근콘크리트공사) 변경계약 사항을 통보하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 사항

하도급공사명	하도급 업체명	하도급 금액(천원)	하도급 기간		변경사유	비고
			변경전	변경후
철근콘크리트공사	㈜서종건설	260,000	‘17.05.19.~ ‘17.09.30.	‘17.05.19.~ ‘17.11.30.	도급 변경계약 (기간변경)에 따른 하도급계약 변경	금액변경 없음

붙 임  하도급 계약(변경) 검토의견서  1부.  끝.

	건축부장
주무관	이원기		환경시설과장	유현수		건축부장	11/21 김진용
협조자
시행	건축부-20021	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)