＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행중인 『잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사

2. 도 급 자 : ㈜일승토건 대표 박명환

3. 계약기간 : 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 28.

4. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감

5. 공사개요 : 당초 D=15~300mm, L=2,934m

변경 D=15~300mm, L=2,195m (감 739m)

6. 설계변경금액

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감(원)
도급비	628,755,900원	506,682,000원	(감) 122,073,900원

7. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비), 배급수관정비

따로붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부.  끝.        추산필 2017.11.24. (감추산)

주무관	김일구		주무관	민은영		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	11/24 차장운
협조자	주무관	제영도		행정지원과장	代김종진
시행	시설관리과-26232	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(7)