문서번호	시설관리과-26216
결재일자	2017.11.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
강희창		박은선	11/24 차장운
협 조
	주무관			이승우
	주무관			윤복철
	주무관			김진성
	주무관			박홍

설계변경 심의 의견서

(이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사)

2017. 11. 24.

강남수도사업소

설계변경 심의 의견서

❍ 공 사 명 : ***********************

신청부서명	시 설 관 리 과
작 성 자	주무관 강 희 창
심의일시	2017. 11. 24.(금)

❍ 심의위원회 의견

- 심의일시 : ‘17. 11. 24.(금) 11:00~12:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견 제시함

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	시설관리과장	적정함	*****
위 원	시설관리과 주무관	타당함	*****
위 원	급수운영과 주무관	적정함	*****
위 원	시설관리과 주무관	적정함	*****
위 원	급수운영과 주무관	적정함	*****

설계변경 요약 보고

공 사 현 황

〇 공 사 명  : ***********************

〇 공사개요  : 당초 – *********************

변경 – ***************************

〇 도 급 비  : 당초 – **************

변경 – ****************************

〇 공사기간  : *************************.

〇 시 공 사  : **************, ***********

〇 예산과목  : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관)정비-21102

설계변경 사유

〇 실정보고 반영

- 방사능 투과시험비외 1건[시설관리과-16223(2017.9.12.)]

· 강관 방사능 투과시험비 설계반영

· 사각밸브실 코너벽돌 사용

- 사평지하차도 출구 기존관 연결방법 변경[시설관리과 -23177(2017.10.19.)]

· 부단수분기(1200/1200)를 라인스토핑(1200mm) 바이패스 변경시공

· 기존관 마개플렌지(1200mm) 폐쇄 설계를 본부 배수과 합동점검 결    과 공법변경 조치 → 본관과 신관에 이음관 체결 후 곡관연결 접합

· 기존관 연결부 굴착심도 증가

· 조적조 가시설 추가설치

- 공사시점부 가시설설치 [시설관리과-23759(2017.10.26.)]

· 공사시점부 가시설(코너벽돌) 설치

- 폐관 충진물량 증가외 2건[시설관리과 -23896(2017.10.27.)]

· 폐관 충진물량 증가(200㎥)

· 기존관의 퇴수관 설치 위치 변경

- 폐관충진 주입구 설치품 추가외 2건[시설관리과 -24027(2017.10.31.)]

· 충진 작업구 설치 공법 변경

· 충진 작업구 설치로 토공량 변경

- 폐기물 증가외 4건[시설관리과 -24834(2017.11.8.)]

· 아스팔트폐기물 증가(104㎥)

· 교통정리원 물량 증가(46인)

· 관마개 설치 철거 공종 추가

· 폐관충진 기계기구 및 플랜트 설치철거 물량 증가

〇 기타사항 반영

- 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금 등 실 납부 금액으로 정산

주요공정 검토현황

구 분	검 토 내 용	검토결과	비고
1. 토 공	저소음 아스팔트포장 절단공외 28개공종	이상없음
2. 부 설 공	강직관 부설공외 74개 공종	〃
3. 구조물공	원형제수밸브실외 12개 공종	〃
4. 가시설 및 충진 전기방식공	SK판넬 설치 및 철거공 외 12개 공종	〃
5. 부 대 공	콘테이너형 가설사무실외 30개 공종	〃
6. 사급자재	SSP주름마디강관외 58개 자재	〃
7. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	〃

공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		2,981,577,600	3,075,016,000	증 93,438,400
도급비	공급가액	1,973,216,000	2,058,160,000	증 84,944,000
	부가가치세	197,321,600	205,816,000	증 8 ,494,400
	합 계	2,170,537,600	2,263,976,000	증 93,438,400
관급자재비		390,000,000	390,000,000	-
복구비 및 기타		421,040,000	421,040,000	-

붙임  1. 설계변경 관련 서류 1부.

2. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.