투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	석촌지하차도 상부도로구조개선공사 인계인수에 따른 회신

1. 시설보수과-6235호(2017.8.9.), 시설보수과-7103호(2017.9.15.), 시설보수과-7582호(2017.10.11.), 토목부-23046호(2017.11.6.)와 관련입니다.

2. 석촌지하차도 상부도로구조개선공사 완료에 따라 우리사업소에 인계인수 요청한 사항은 위 공문서에 의거 기 통보드린바 있는 “공사 진행중 안전점검(추석대비)”과 “외부전문가 합동 예비준공검사” 및 인계인수에 따른 지적사항을 보완조치후 결과(전,후 사진 첨부)를 우리사업소 통보하여 주시고,

가. 안전점검 지적사항에 대한 조치결과 서류 제출

1) 추석대비 도로시설물 안전점검 지적사항에 대한 조치결과(시설보수과-7103호(2017.9.15.)

2) 외부전문가 참여 예비준공검사 결과 지적 및 조치결과(시설보수과-7582호, 2017.10.11.)

3) 2017.11.20.일 인계인수에 따른 전문가 합동 현장점검 지적사항(따로붙임 지적사항 참조)

3. 상부도로구조개선 시설물에 대하여 한국시설안전공단에서 운영하고 있는 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 관련 자료와 내용을 입력 및 승인을 득한후 인계인수 요청하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 인계인수에 따른 행정절차(시설물정보관리종합시스템-FMS) 입력 및 승인

1) 시설물관리시스템 : 한국시설안전공단(http://www.fms.or.kr/)

2) 로그인 방법 : ID(pyk0420), PW(5942)

3) 입력내용 및 방법 : 한국시설안전관리공단 상세 문의(055-771-1999)

ㅇ 초기점검 실시 결과

ㅇ 상부도로구조개선 시설물 상세 내역(구조체 시설물에 한함)

ㅇ 준공 설계도서 제출 등

다. 인계인수 관련 우리사업소 제출서류

1) 준공 설계도서 및 CD 각 5부.

2) 초기점검 보고서 5부.

3) 공사참여자 현황 1부.

4) 공종별 하자보수보증서 각 1부.

5) 기타 유지관리에 필요한 사항 1식

※ 시설물 준공에 따른 서울도서관 제출은 귀 본부 별도 제출

붙임 : 인계인수에 따른 지적사항 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		시설보수과장	11/22 김환겸
협조자
시행	시설보수과-8577	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개