문서번호	물재생시설과-16914
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장
김태환		김윤수	11/22 이철해
협 조

악취조사용역 설계변경 보고

2017. 11

물순환안전국 물재생시설과

악취조사용역 설계변경 보고

하수도 악취저감 시설개선사업 악취조사지역 공사 미완료에 따라 용역기간을 연장하는 설계변경을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 하수도 악취저감 시설개선사업 악취조사 용역

○ 용역기간 : 2017.3.6 ~ 11.30

○ 용 역 비 : 19,454,300원

○ 용 역 사 : ㈜한국하수도기술

○ 주요과업내용

- 하수도 시설개선 대상지역 악취조사 지점 선정

- 하수도 악취저감 시설개선사업 추진 전후 악취조사 및 평가

□ 추진경위

○ ‘17.2.07 : 하수도 악취저감 시설개선사업 악취조사 용역계획 방침

○ ‘17.3.06 ~ : 계약완료 및 사업추진

○ ‘17.8.22 : 계약변경(용역비)

□ 설계변경내용

○ 변경내역 : 사업기간 연장

구분	당초	변경	비고
용역기간	2017.11.30	2017.12.30	30일 연장

○ 변경사유 : 자치구별 시행중인 악취개선사업 지연에 따른 조사기간 연장

□ 조치계획 : 계약변경

○ 용역 계약변경 의뢰(→재무과), 용역사인 ㈜한국하수도기술과 변경계약 체결

붙임 : 사업계획 방침서, 계약변경 합의각서 각 1부.  끝.