투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(신내지하차도 보수공사)

우리 사업소에서 시행중인 “신내지하차도 보수공사”에 대하여 감독기관으로부터 변경설계도서가 제출되어 아래와 같이 설계변경을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 신내지하차도 보수공사

나. 공사기간 : 2017.08.24 ~ 2017.12.21

다. 도 급 사 : ㈜비엠글로벌산업  대표 강혜선, 박경호

라. 설계변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감액
총 공 사 비		499,042,400	434,408,550	감 64,633,850
도급비	공 급 가 액	213,856,728	220,070,000	증 6,213,272
	부가가치세	21,385,672	22,007,000	증 621,328
	계	235,242,400	242,077,000	증 6,834,600
관 급 비		192,010,000	174,840,350	감 17,169,650
이전비및기타		71,790,000	17,491,200	감 54,298,800

마. 설계변경사유 :

1) 공사현장 여건에 따른 변경

- 지하차도 기둥 표면보수 추가 A=425㎡ → 798.9㎡

- 공사안내간판 추가 N=10개 → 22개

- 바닥콘크리트 열화부 보강 A=0㎡ → 14.3㎡

2) 보험료 등 제경비 정산 변경

바. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 신내지하차도보수,                    시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 설계변경 관련 자료 1부. 끝.

★주무관	이경수		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	11/24 이종엽
협조자	주무관	최태석		주무관	이현은		관리단속과장	박영종
시행	시설보수과-4430	(		)	접수		(		)
우	04807	서울시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1562	/	leesoo@seoul.go.kr	/	대시민공개