문서번호	시설보수과-8649
결재일자	2017.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김부호		김환겸	11/24 송만규
협조
	주무관		나철흠

『매봉터널 외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역』

설 계 변 경  검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

동부도로사업소

(시설보수과)

『매봉터널 외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역』

설 계 변 경  검 토 보 고

Ⅰ		용역현황

○ 용 역 명 : 매봉터널외 3개소 보수공사 건설폐기물처리용역

○ 용역기간 : 2016. 05. 11. ~ 2017. 12. 31.

○ 도 급 비 : 26,709,000원

○ 용역개요

- 폐아스콘 운반 및 처리 3,576톤

- 폐콘크리트 운반 및 처리   255톤

○ 도급자 : 청한산업개발 대표 차중환(폐기물운반)

청한공영(주) 대표 서종근(폐기물처리)

Ⅱ		설계변경 사유

○ “매봉터널 및 영동3교 보수공사”의 폐기물 처리물량 증.감사항 발생

공사명	폐기물 성 상	운반량(㎥)		처리량(톤)				비 고
		당초	변경	무대		유대
				당초	변경	당초	변경
영동3교 보수공사	폐아스콘	456	476	2,311	414,59	392	705.17
	폐콘크리트	22	51	-	-	50	117.8
매봉터널외 2개소 보수공사	폐아스콘	371	264	835	620.4	37	0
	폐콘크리트	0	4	-	-	0	9.2

- 영동3교 아스팔트 포장 평삭에 따른 보도부 처리물량 변경 보고,

(시설보수과-7157, 2017.09.18.)

- 매봉터널외 2개소 보수공사 설계변경 검토보고(시설보수과-7157, 2017.09.18.)

Ⅲ		설계변경 증․감 현황

○ 용역비 증․감 현황

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	26,709,000	31,460,000	증)4,751,000	영동3교 17,939,000원 → 25,531,000원 · 증 7,952,000원 매봉터널 8,770,000원 → 5,929,000원 · 감 2,841,000원

○ 예산과목별 증감 내역

예 산 과 목	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
계	26,709,000	31,460,000	4,751,000
교량안전과,교량관리,교량시설물운영,도로시설물운영,도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비	17,939,000	25,531,000	7,592,000
도로시설과,도로시설관리,지하차도시설관리,가락지하차도외 1개시설(천호지하차도) 보수,시설비	627,950	0	-627,950
도로시설과,도로시설관리,터널시설관리, 매봉터널보수,시설비	8,142,050	5,929,000	-2,213,050

Ⅳ		조치의견

○ 상기와 같은 변경사항에 대하여 설계변경 시행하여 공사시행에 도로시설물 유지관리업무에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 영동3교 아스팔트포장 평삭에 따른 보도부 폐아스콘 처리물량 변경보고 1부.

3. 매봉터널외 2개소 보수공사 설계변경 검토보고 1부.  끝.