문서번호	급수운영과-27336
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최성태	유명수	11/27 유용일

현장실정보고서에 따른 검토사항 보고-1

(보광배수지(1,2지)내부방수방식공사)

2017. 11.

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

우리사업소에서 시행중인 “보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사”와 관련하여 건설사업기술관리자 ㈜이준엔지니어링으로부터 현장 실정보고가 접수됨에 따라 검토사항을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

가. 공 사 명 : **********************

나. 공사개요 : ************************************

*****************************

********************************************

************************

****************************

***********************************

□ 보고내용 및 검토의견(관련근거 이준중부 1708-111,‘17.11.24호와 관련임)

연번	구 간	㈜이준엔지니어링 건설사업기술관리자 요청내용	사업소 검토의견
1	배수지 1지	❍ 배수지 1지 폐기물 발생에 따른 실정보고(신규공정) - 보광배수지 1지 그라인딩(콘크리트+페인트면) 작업으로 인한 폐기물(폐합성수지) 및 처리비용 발생 (1지 10.88톤 + 2지 10.88톤(예상) = 21.76톤) ※ 검토의견 ❍ 폐기물 관련하여 설계에 기 반영되지 않았으나 그라인딩(콘크리트+페인트면) 작업시 발생된 폐기물 이므로 시공사에서 제시한 처리비 보다 저렴한 환경부 고시 금액으로 적용하여 설계변경 시 반영함이 타당함. - 개략공사비 : 증)3,982천원	〇 검토결과 : 타당함. 그라인딩 작업중 발생된 폐기물로 반드시 중량확인 후 반출 및 설계변경 시 사진 등 근거자료를 확보하여 보고토록 조치하고자 함.

□ 조치의견

가. 상기 검토 의견과 같이 감독업무를 수행하고 있는 ******************에 통보하여 설계변경 및 배수지 방수방식공사 시행에 만전을 기하고자 합니다

별  첨 : 1. 현장 실정 보고서  1부.  끝.