시 행	설비부-19982
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	백남진	代이호완	전결 11/27 권오식

제31차 설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-19589호				요청부서		환경설비과		자문일자		2017.11.24.
공 사 명			신림~봉천터널 1공구 전기공사
공 사 개 요			공사규모				· 도로운영방안 변경 및 터널 종단선형 변경에 따른 설계변경(전기분야) · 총 연장 L=3,100m (터널: L=1,720m, 지하차도: 877m U-Type포함)
			공사기간				2010. 10. 05. ～ 2017. 12. 31.
			감 리 사				㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링
			설 계 사				극동엔지니어링(주)
			시 공 사				두산건설(주)외 8개사
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
설계변경사항(요약) ○도로운영방안 변경(유료→무료)에 따른 영업소 삭제 및 신림선 경전철 중첩에 따른 종단선형 변경(0.3%→-0.3%)으로 인한 설계변경 - 전기분야 : 동력 및 배전선로, 조명, 기타 전기 1식 수량변경 - 소방분야 : 영업소 삭제로 톨게이트 및 영업소 소방설비 삭제 - 통신분야 : VMS, LCS 수량증가 및 속도제한표지 반영, CCTV설치 등 기타 통신 1식
원설계자 의견
자문결과		조건부가결			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
위 원 장 : 녹색성장과장 오삼록, 간사 : 백남진 외부위원 : ㈜삼삼이엔지 이사 김승기, ㈜천일 부회장 김기식 내부위원 : 박희정. 박경희, 호정오.