＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-14356(2017.11.24.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사”에 대한 공사실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사진행에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토의견

서울시설공단 실정 보고

사업소 검토의견

1. 암 발생 문제로 인한 공사진행 여부 결정

가. 공사기간 및 금액 증가(암반구간)

구분	당 초	변 경	증·감
금액	*********	***********	***********
기간	14일	100일	증)86일

※ 동절기 굴착통제(12월~2월)로 인해 금년도 준공 불가능

2. 암깨기에 수반되는 중복터파기 등 증가 반영

- 중복터파기, 수채공, 굴착폭 등 증가

1. 검토결과 : 암깨기 적정단가 재검토

- 실정보고시 기 제출된 “연암깨기 및 싣기” 단가로는 공사 증액금액을 판단하기 어려움

- 적정단가를 재산출하여(품셈근거 첨부) 지참 보고하고 새로 제출된 단가로 총 공사 증액금액을 확인, 공사 진행 여부 판단

2. 검토결과 : 타당함

- 실 시공량을 근거 사진을 확보하여 설계변경시 반영

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	유명수		급수운영과장	전결 11/27 유용일
협조자
시행	급수운영과-27285	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)중부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-2160	/전송	02-3146-2189	/		/	부분공개(6)