문서번호	급수운영과-27249
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
이상현	유명수	11/27 유용일

공사현장실정보고서 검토보고

(한남테니스장~ 동국대입구역 송배수관 정비공사)

2017. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

1. 제    목 : 공사 실정보고서 검토 보고

2. 관련근거 : 공사감독2처-14356(2017.11.24.)호

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : D=200~700㎜, L= 1,735m

*******************************************27.

************************

***************************

*************************이정복

4. 보고내용 및 검토의견

연번

서울특별시시설관리공단 요청내용

사업소 검토의견

1

❍ 암 발생 문제로 인한 공사진행 여부 결정

1. 암 발생에 따른 암깨기 보고

가. 당초 토사로 설계된 구간(L=397m)이 암반으로 확인

나. 암구간에 대해 저소음 코아드릴천공 암깨기를 시행하였으나 일평균 작업량이 6㎥에 불과함(약 4m)

다. 실 투입비에 따른 1㎥당 공사비 : 938천원

2. 암 발생에 따른 문제점

가. 공사기간 및 금액 증가(암반구간)

구분	당 초	변 경	증·감
금액	*********	***********	***********
기간	14일	100일	증)86일

※ 동절기 굴착통제(12월~2월)로 인해 금년도 준공 불가능

〇 암깨기 적정단가 재검토

가. 실정보고시 기 제출된 “연암깨기 및 싣기” 단가로는 공사 증액금액을 판단하기 어려워

나. 적정단가를 재산출하여(품셈근거 첨부) 지참 보고토록 서울시설공단에 통보하고자 하며

다. 제출된 단가로 공사 증액금액을 산정, 공사 진행 여부를 판단하고자 합니다.

2

❍ 암 깨기에 수반되는 중복터파기, 수채공, 굴착폭 증가 반영

1. 중복터파기 : 일일 암깨기 연장이 약4m에 불과하여 당일 깨기, 당일 관로부설이 어려움

2. 수채공 : 코아드릴천공에 사용되는 작업수로 인한 추가 수채공이 필요함

3. 굴착폭 : D700mm 상부폭은 1.488m이나, 코아드릴천공으로 인해 암깨기 깊이에 따라 상부폭1.7~1.94m 필요함

〇 암깨기에 수반되는 공종 실 시공량 반영

가. 암깨기로 인한 중복터파기, 수채공, 굴착폭의 증가는 실 시공량을 설계변경시 반영하고자 함

5. 조치의견

가. 상기 검토 의견대로 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여  시공에 만전을 기하도록 조치하고자 합니다.

별  첨 : 1. 관련공문 1부.

2. 공단 실정 보고서 1부.

3. 현장 실정 보고서 각 1부.  끝.