투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-12406호(2017.11.24.)와 관련입니다.

2. 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구)의 물가변동 및 건설사업관리기술자 투입계획이 변경되어 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설사업관리용역(4공구)

나. 계 약 자 : ㈜신성엔지니어링 외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2011.11.01. ~ 2022.03.07.	2011.11.01. ~ 2022.03.07.	변경 없음
2차	2017.09.07. ~ 2018.03.26.	2017.09.07. ~ 2018.04.20.	증)25일

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	사 유
총괄 (제3회)	2,496,730,000	2,506,190,000	∘계약금액 : 증)9,460천원 ∘변경사유 - 물가변동 반영 : 증)9,460천원
2차 (제1회)	250,000,000	292,440,000	∘계약금액 : 증)42,440천원 ∘변경사유 - 물가변동 반영 : 증)9,460천원 - 감리배치 조정 : 증)32,980천원

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비및부대비, 감리비

(도시철도건설사업특별회계)

붙  임 : 1. 물가변동 및 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 변경내역서(총괄 제3회) 1부

3. 변경내역서(제2차 제1회) 1부

4. 합의각서 각 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	정영호		공정관리과장	김형건		도시철도사업부장	11/27 박동룡
협조자	주무관	원길묵		주무관	박형복		주무관	임병길
경리과장	代김용범
시행	도시철도사업부-12450	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7162	/전송	02-772-7305	/	elete123@seoul.go.kr	/	대시민공개