＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 2차변경계약 결과 보고[여과지 수질측정 샘플배관 개선공사]

우리 센터에서 시행중인 공사계약건에 대하여 2차변경계약을 체결하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 계약건명 : 여과지 수질측정 샘플배관 개선공사

나. 계약업체 : ㈜제이씨플랜트, 대표 조 천

다. 계약변경 내역

1) 공사기한

- 당   초 : 2017. 06. 15 ~ 2017. 09. 18

- 1차변경 : 2017. 06. 15 ~ 2017. 11. 30(2017.09.12)

2) 계약금액

- 당   초 : 금51,978,759원

- 2차변경 : 금56,991,000원(증액5,012,241원)

3) 변경사유

○ 공종별 물량증가 및 제경비 정산

라. 변경계약 일자 : 2017. 11. 24

붙임 : 1. 변경 계약서 1부, 2. 설계변경 내역서 1부, 3.추가 계약보증서 1부,

4. 추가 도시철도채권 1부, 5. 합의서 1부, 6. 공사계약 일반조건 1부.

7. 서울시 공사계약 특수조건 1부. 끝.

주무관							윤충용				행정관리팀장					권영철					광암아리수정수센터소장					11/27 차윤기
협조자
시행			행정관리팀-3188										(						)		접수												(						)
우	12989					경기도 하남시 서하남로 293																/
전화		02)3146-5312							/전송			02)3146-5309					/														/	부분공개(7)